투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	아동청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역 변경계약 의뢰

우리본부에서 시행 중인 『아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역』에 대하여 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요

가. 용 역 명 : 아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역

나. 계 약 자 : ㈜디아건축사사무소(정현아), ㈜하나기연(김인선)

다. 용역금액 : 금구천이백삼십만원(￦92,300,000원)

라. 계약기간 : 2014.12.18 ~ 2015.05.16

2. 계약변경내용

변 경 전		변 경 후		비 고
기 간	금 액(원)	기 간	금 액(원)
‘14.12.18~ ’15.05.16	92,300,000	‘14.12.18 ~ ’15.06.16	좌 동	증) 31일

가. 연기사유 : 기존 건축물의 구조 보수 및 보강에 대한 자문 결과                                 반영에 따른 용역기간 연장

나. 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

다. 예산과목 : 조직)문화체육관광본부 문화정책과, 정책)문화도시 서울                               구현, 단위)문화향유 공간 및 문화기반시설 조성, 세부)                                지역예술교육센터 조성, 평성목)시설비 및 부대비

따로붙임 : 기간연장 보고서  및 연기요청서 각1부.  끝.

	건축부장
주무관	정재흥		의료시설과장	송종훈		건축부장	05/12 代강성욱
협조자	주무관	박춘복		경리과장	허금도
시행	건축부-5471	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층(무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2616	/전송	02)3708-2659	/	jjh5160@seoul.go.kr	/	대시민공개