보고서(급수공사연기)

★주무관	주무관	급수운영과장		결재
강재성	代강재성	05/13 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-11466

2014년 성동구 상수도공사 감독업무 수행중 *********** 수요가로부터 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

보고자 :  ************

공사현황 : 2014년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	***************	***	‘15. 5.4 ~ 5.13	개량56

연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기 기간	연기요청 사유
1	***************	***	‘15.05.26	수요가 연기요청 (옥내 배관공사 일정으로 인하여 수요가 협의후 작업 가능함)

검토결과

- 상기 위치에 대하여 급수공사 시행하려 하였으나 수요가 사정으로, 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	***************	***	‘15.05.04 ∼ ’15.05.13	‘15.05.04 ∼ ’15.05.26

첨 부 : 공사연기 요청서 1부(별도첨부). 끝.