	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	사업중단에 따른 용역예산 감액처리

1. 방재시설부-5099(2015.4.16.) 호와 관련입니다.

2. 집단민원에 의한 공사 중단으로 계약이행이 불가한 건설폐기물 처리용역에 대한 사업비를 아래와 같이 감액처리 하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : ‘13.3.11 ~ 15.2.28

다. 용역업체 : **************

라. 사 업 비 : ***************

마. 예산과목 : 도시안전본부 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책, 잠원빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사 건설폐기물 처리용역 감액 요청서 1부. 끝

주무관	김선익		경리과장	허금도		건설총괄부장	05/13 代최갑영
협조자
시행	건설총괄부-9379	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 무교동 96번지 프리미어플레이스 11층 경리과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	(02)3708-8685	/전송	(02)3708-2365	/	mansi103@seoul.go.kr	/	부분공개