함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	원인자 이설공사 연기(풍납동473-5)

원인자이설공사로 접수된 공사건 중에 [군자외2역 승강편의시설 설치공사(17공구)-풍납동473-5]에 대하여 E-메일로 공사연기신청이 접수되어 이를 승인 통보코자 합니다.

1. 공사번호 : L201310233

2. 공 사 명 : 군자외2역 승강편의시설 설치공사(17공구)- 풍납동473-5

3. 공사위치 : 풍납1동 473-5번지 일대

4. 공사개요 : D=150㎜, L=40m 상수도관 이설

5. 연기사유 : 사유지 및 기존구조물 내 상수도관이 저촉되어 구조물 공사완료 후 이설시행

6. 공사기간

구 분	당 초	변 경
공사기간	2013년 10월 23일 ~ 2013년 2월 28일	2013년 10월 23일 ~ 2014년 3월 10일 (예상기간 : 2014.3.5.~3.6.)

첨부  :  접수공문 1부.  끝.

주무관							최지영			주무관					김용현					주무관					박종찬				급수운영과장						03/03 우종근
협조자
시행			급수운영과-3300									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로51 (성내1동 541-4)															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		3146-5152						/전송			3146-5189					/	jiyoung@seoul.go.kr												/	부분공개(5)