문서번호	방재시설부-6414
결재일자	2015.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
고소영		김인숙	05/13 임춘근
협조

-경춘선폐선부지 공원조성공사-

옹벽 녹화방안 실정보고 검토

2015. 05

도시기반시설본부

(방재시설부)

-경춘선폐선부지 공원조성공사-

옹벽 녹화방안 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」와 관련 옹벽 녹화방안 실정보고에

대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–457(2015.05.12)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)

○ 위    치 : 노원구 공덕제2철도건널목 ~ 육사삼거리

○ 규    모 : 공원조성 48,170㎡, L=1.98km

○ 사업기간 : 2013.10.10. ~ 2015.5.15.

○ 공 사 비 : 6,044백만원

Ⅱ

검토내용

□ 실정보고 사유

▸ 경춘선 공원의 품질향상과 시공완성도를 높이고 수직구조물(옹벽,           석축, 램프옹벽 등)의 벽면녹화를 통한 조화를 도모하고자 하며

▸ 공사구간 및 녹지주변의 경관 저해요소(노후시설, 콘크리트노출            등)에 대하여 녹화를 시행함으로써 이용객 볼거리 제공과 인공적인

시설에 자연미를 부과하므로써 공원과의 조화를 높이고자 함

□ 실정보고 내용

○ 현황 및 적용방안

▸  구조물녹화 type A(도깨비시장 주변 옹벽)

- 시장이용객, 주변거주지역민, 경춘선공원의 주요광장역할 등을              고려할 때 신설옹벽이 콘크리트면 노출되어 다소 삭막하므로               이에 대한 미관개선이 요구됨

⇒ 자동관수시스템이 도입된 U그린채널 설치

(유지관리 용이, 내한성식물 도입으로 동절기 관리 용이)

▸ 구조물녹화 type B(두산힐스 아파트 기존석축 주변)

- 공원에 접한 오래된 석축 구조물로 공원 이용객에게 높은 수직             구조물이 주는 위압감 해소와 석축의 퇴색된 상태 보완이 요구됨

⇒ 그린와이어(덩굴식물 도입)으로 벽면녹화

▸ 구조물녹화 type C(화랑대역 램프 주변)

- 자전거, 버스, 지하철 이용객 등 유동객이 많은 공간으로 램프             옹벽은 삭막한 수직옹벽으로 인식됨

⇒ 옹벽상단 난간을 이용한 걸이형 화분 설치

○ 설계사 의견 : 입면녹화는 최소규모를 적용하고 덩굴식물 위주로 식재

○ 물량검토

구 분	시공사제안	감리단조정	증 감	감리단 조정내용
구조물녹화(TYPE-A)	60㎡	55㎡	감)5㎡	식재구간 제외한 옹벽구간만 적용
구조물녹화(TYPE-B)	100㎡	60㎡	감)40㎡	기존석축 최대한 유지 덩굴성 식물구간으로 최소화
구조물녹화(TYPE-C)	60㎡	0㎡	감)60㎡	걸이형화분의 문제점(손괴, 분실, 유지관리의 어려움 등)으로 금회 삭제

○ 공사비 검토

▸ 기존항목 : 계약단가 또는 설계변경(2014.12.16.)승인 단가 적용

▸ 신규항목 : 설계기준일 신규단가 × 협의율(92.751%) 적용

▸ 공사비 변경 : 시공사제안 109,890천원 → 감리단 조정금액 75,520천원

(단위 : 원)

구 분	시공사제안	감리단조정	증 감	비 고
구조물녹화(TYPE-A)	52,010	47,676	감) 4,334
구조물녹화(TYPE-B)	14,282	8,569	감) 5,713
구조물녹화(TYPE-C)	15,547	0	감) 15,547
순공사비 계	81,839	56,245	감) 25,594
제경비(VAT포함)	18,061	12,410	감) 5,651
총 원 가	99,900	68,655	감) 31,245
부가가치세	9,990	6,865	감) 3,125
도급공사비	109,890	75,520	감) 34,370

Ⅲ

감리원 검토의견

○ 옹벽 등 벽면에 대한 녹화방안과 관련한 실정보고는 당 현장의 이용객 및 주변 거주민, 신규시설과 기존시설의 조화 등을 고려하였을 때 무방한 계획이나, 시공사 의견과 같이 설치하더라도 설계사인 서안(주)의 의견을 반영하여 최소화 하는 방안으로 검토함이 적정하리라 판단됨

○ 이에 현장상황(설치가능물량) 및 유지관리 존치여부 등을 감안하여 수량을 조절(삭제)함이 이상적이라고 판단됨.

○ 따라서 감리단 조정내용과 같이 시행하고, 변경된 공사비는 설계변경을 통한 계약변경함이 효율적이라 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』옹벽녹화방안 실정보고에 대하여 책임감리원의 의견은 타당하다고 판단되어 승인코자 하며,

○ 설계변경 심의 결과를 반영하여 설계변경토록 지시코자 함.

붙 임 : 감리 검토 의견서 1부.  끝.