【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청서

(용허리공원 빗물저류조 설치공사)

대시민공개

시 행	방재안전시설부-3296
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자

주무관		치수시설과장	방재안전시설부장			결재
한종수		서관석	03/03 박종웅
협 조

공 사 명	용허리공원 빗물저류조 설치공사	요청기관	도시기반시설본부 방재안전시설부
공사위치	서초구 서초동 1324-1번지 일원(용허리공원 내)
공사기간	2012. 12. 21 ~ 2014. 5. 30
계약금액 (최초계약 금액)	7,625,521,000원(5,590,280,000원)
공사개요	저류조 설치 V=15,000㎥, 유입관로 설치 L=237m
설 계 자	․상 호 : 한국종합기술 ․ 대 표 자 : 이강록 ․책임기술자 : 김창배 (전화번호 : #############)
발 주 자	․담 당 자 : 한종수 (전화번호 : 3708-8772)
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) - 용허리공원 빗물저류조 설치공사를 2012년 공사발주하여 12월 공사계약 함. - 2013. 1월 도로점용허가 및 공사중 교통소통대책 심의를 마친 후 공사 착공하여 2013. 12. 26 저류조 구조물 완료 하였음. - 2013년 12월 계약이후 3건의 변경사항이 있어 설계내역을 심사 요청 함 (3건 증592,624천원) ․ 2013. 4~6월 임시저류조 사용에 따른 돌관작업으로 사토처리장을 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 산39-1로 변경(운반거리 15km→43.9km 증28.9km)하여 사토 처리 하였으며(증558,604천원), ․철근 조립 및 거푸집설치, 콘크리트 타설을 위한 비계가 누락되어 작업자의 안전사고 방지 및 작업의 효율성을 높이기 위하여 강관틀비계를 반영하였고(증11,550천원), ․터파기 공사중 지하매설물도에 표시되지않은 하수관등 지중 구조물이 발견되어 폐기물 처리 (폐기물용역 증22,110천원 도급비 증360천원)하였음.
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(설계변경내역서, 도면, 시방서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	서울특별시도시기반시설본부장