문서번호	시설과-3345
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
정연준	김인규	05/14 강신재
협 조

중랑천 횡단 상수도관 이설공사 건설사업관리용역

분야별 건설사업관리기술자 투입조정 보고

2015. 5.

상수도사업본부

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

중랑천 횡단 상수도관 이설공사 건설사업관리용역

분야별 건설사업관리기술자 투입조정 보고

「중랑천 횡단 상수도관 이설공사 건설사업관리용역」수행중 사업관리를 위한 분야별 건설사업관리기술자의 투입기간 조정이 필요하다는 건설사업관리자의 보고가 있어 검토 결과를 보고 드림.

1
		용역개요

○ 용 역 명 : 중랑천 횡단 상수도관 이설공사 건설사업관리용역

○ 용역대상 : 기존관 철거 D=1,650㎜, L=125m

상수도관 신설  D=1,350㎜, L=125m (세미쉴드 D=1,650㎜, L=96m)

○ 계약금액 : 309,129천원

○ 계 약 일 : 2014. 11. 5.

○ 착 수 일 : 2014. 11. 5.

○ 준공예정일 : 2015. 8. 4.

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링, ㈜서영엔지니어링

2
		보고요지

○ 「중랑천 횡단 상수도관 이설공사」건설사업관리 용역 수행 중 공정에 따른 사업관리를 위하여 분야별 건설사업관리기술자(토목, 기계)의 투입조정이 필요함.

○ 투입개월 조정

▸ 기계(용접) 건설사업관리기술자 : 6개월 → 2.5개월 (감 3.5개월)

▸ 토목분야 건설사업관리기술자 : 8개월 → 9개월 (증 1개월)

3
		검토결과

○ 「중랑천 횡단 상수도관 이설공사 건설사업관리용역」수행 중 당초 기계(용접) 건설사업관리기술자 투입이 6개월로 되어 있었으나 강관부설 공정에 따른 실투입시기 조정에 따라 투입을 2.5개월로 조정

○ 준공기한까지 건설사업관리 제반업무(보고서, 유지관리지침서, 시설물 인수․인계서 등)의 원활한 수행을 위하여 토목건설사업관리기술자는 당초 8개월에서 9개월로 조정

○ 조정결과

구 분	투 입 기 간		비고(투입개월)
	당 초	변 경
기계(용접)분야 건설사업관리기술자	2014.12.05. ~ 2015.06.04	2015.03.16. ~ 2015.05.31	6개월→2.5개월 (감3.5개월)
토목분야 건설사업관리기술자	2014.11.05. ~ 2015.07.04	2014.11.05. ~ 2015.08.04	8개월→9개월 (증1개월)

○ 용역비 : 감 23,553천원

(당초) 309,129천원 → (변경) 285,576천원

4
		향후일정

○ 책임건설사업관리기술자에게 분야별 건설사업관리기술자 조정사항을 반영하여 조정하도록 하고, 본부 소위원회에 계약금액조정 검토 후 검토결과를 설계변경에 반영코자 합니다.

붙임 : 분야별건설사업관리자 투입기간변경 감리보고서 1부. 끝.