문서번호	전산정보과-4305
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
오지현		홍동섭	05/14 이성규
협조	★기획예산과장		최생인
	재무회계과장		조두업

- 안정적인 전산실 운영을 위한 -

전산실 전산장비 접지공사 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

요 금 관 리 부

(전산정보과)

- 안정적인 전산실 운영을 위한 -

전산실 전산장비 접지공사 추진계획

전산실의 정전기 방지 및 이상전압 발생시 장비 및 인명사고 방지를 위한 전산실 접지공사를 실시하여 안정적인 전산실 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

자가전기통신설비 정기검사(4월) 결과 알림(시정명령)(서울전파관리소     방송통신서비스과-3490, 2015. 4.24)

▶ 시정요청사항 : 전산실 접지설비 미설치 및 축전지 보관함 외함 미접지

전산실의 정전기 발생 예방으로 안정적인 시스템실 운영

Ⅱ		운영현황

전산실 장비 운영현황

(단위 : 대)

구분	면적	장비 랙	항온항습기	UPS	밧데리 함	하론소화기
전산실	65.61㎡	14	2	3	3	2
통신실	65.61㎡	34	2	2	2	2

UPS 5대 및 통신사업자 장비랙 3개는 기 접지시설이 완료되어 있음

※ 통신사업자 장비랙 : KT, LG U+등 전용회선 사용을 위한 통신시설

Ⅲ		추진개요

전산실 접지공사

사업명 : 전산실 접지공사 용역

사업기간 : 계약일로부터 10일

설치대상 : 전산실 전산시스템 랙 및 기반시설

소요예산 : 3,300,000원

예산과목 : 일반관리비,(행정정보시스템 유지보수), 수선유지교체비,(시설장비유지비)

계약방법 : 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조 제1항 제5호

- 사유 : 금액이 소액이고, 금년도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역을 수행하고 있는 업체와 계약을 통한 사업안정성 확보

- 계약업체 선정 : ㈜시스원 (대표 이갑수, 서울 용산구 소재)

전산실 접지공사 상세일정

작업일정 : 2015. 5. 21(목)~ 22(금) 예정

작업인원 : 6명

작업방법

접지단자함					접지슬리브 T형분기					시스템랙,기반시설
메인접지선 배선										분기접지선 연결

작업일정

장 소	작 업 일 정	작 업 내 용
전산실 (5.21, 목)	09:00 ~ 10:00	주의사항 교육 및 자재입고
	10:00 ~ 14:00	메인접지선 및 분기접지선 배선
	14:00 ~ 15:30	접지 슬리브 T형 분기 연결
	15:30 ~ 17:00	전산장비 랙 및 기반시설 연결
	17:00 ~ 18:00	점검 및 확인

※ 5.22(금) 통신실 동일 작업 실시

추진일정

계획수립 : 2015. 5. 13(수) ~ 14(목)

발주 및 계약체결 : 2015. 5. 15(금) ~ 5.20(수)

접지시설 설치 : 2015. 5. 21(목) ~ 5.22(금)

Ⅳ		기대효과

전산실 누전(이상전압 발생)시 장비 및 인명피해 방지

<붙임 1>

전산실 접지공사 자재 목록

구분	품목	주요 규격	제품이미지	수량	비고
1	TFR-GV 35SQ	가온전선 KS 규격품		100m
2	TFR-GV 16SQ	가온전선 KS 규격품		50m
3	TFR-GV 6SQ	가온전선 KS 규격품		250m
3	접지슬리브 T형 분기	주문제작		60개