의원 요구 자료 제출

시 행	경제정책과-6731	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
수 신 자	재무과장

주무관	경제정책과장	창조경제기획관	경제진흥본부장		결재
최동철	이해우	천정욱	05/15 서동록
협 조
	서비스산업팀장			오근

제 목	결삼검사 위원 요구자료 제출(요구번호 2015-134, 김성국 위원)

붙 임 : 결산검사 위원 요구자료 1부.  끝.

김성국 위원(결산검사위원회)

○ 요구번호 : 2015-134

○ 요구내용 : 서울형 특화산업지구 지정‧운영 관련

1. 사업계획서

2. 시설비/자산취득비 전년도 이월내역, 당년도 명시/사고이월 명세, 집행잔액
상세 내역 및 전년도 이월액 중 불용사유

사업계획서 : 붙임

시설비/자산취득비 전년도 이월내역 및 집행잔액 발생 사유

(단위 : 백만원)

사업명	통계목	전년도이월액 (사고)	집행 잔액	이월내역	집행잔액 발생사유
서울형 특화산업지구 지정‧운영 (종로주얼리 비즈니스센터 건립)	시설비	710	327	제1센터 건립공사 설계비 및 공사비	․건축규모변경, 센터 활용방안 관련 자문회의 개최 등으로 설계용역이 지연(`14.10월 완료)되어 공사를 `14.12월에 착공하여 시설비 일부만 집행
	자산 및 물품취득비	2,530	1,631	제1센터 보석감정장비 등 물품 구매비	․사업규모 축소 : 당초(2012년) 센터건립(1개소) 계획으로 자산취득비를 편성하였으나, 제1, 제2센터(2개소) 건립으로 계획이 변경됨에 따라 제1센터의 규모에 맞는 장비만 구매 ※1센터(`15.5준공), 2센터(`16.12준공)

2014년도 명시/사고이월 명세, 집행잔액 상세내역

(단위 : 백만원)

사업명	통계목	최종 예산	이월액			집행 잔액	비고
			계	명시	사고
서울형 특화산업지구 지정‧운영 (종로주얼리 비즈니스센터 건립)	시설비	1,970	1,874	1,746	128	9	‧이월사유 : 사업대상지가 문화재보호구역으로 정밀시굴조사 시행(3~6월)에 따라 설계 공모, 발주 지연 - 공사비는 명시 이월 - 설계비는 계약(원인 행위) 후 사고이월 ‧집행잔액 : 설계비 낙찰 차액 등 집행잔액

붙임 : 종로주얼리비즈니스센터 건립 사업계획서 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (경제정책과)	담당사무관	오 근
	☎2133-5230	담당자	최 동 철
	작 성 일 : 2015.5