문서번호	토목부-10094
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	05/15 노우성
협조
	주무관		강철규

녹분진 방지망 설치비 반영 검토보고

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

2015. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

녹분진 방지망 설치비 반영 검토보고

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

교통처리를 위해 임시로 설치한 가설교량에서 부식산화물(녹) 낙하되어 주변상가 및 주차장을 이용하는 시민들로부터 민원이 발생, 긴급 설치한 녹분진 방지망 설치비용을 반영하기 위한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 응봉감 제‘15-138호(2015. 5.13.) 실정보고(가설교량 녹분진 방지망 설치)

○ 토목부-6855호(2015. 4. 6.) 업무지시전(민원사항에 대한 조치방안 검토)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선공사

○ 위    치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동(기존 응봉교 구간)

○ 규    모 : 응봉교 확장 및 성능개선
-왕복4차로 → 6차로 확장(교량L=625m, 옹벽 L=68m)

○ 공사기간 : 2008.10.∼ 2015.12.

○ 도 급 비 : 738억원

○ 감 리 사 : ㈜건화엔지니어링, ㈜제일엔지니어링  ○ 시 공 사 : 한신공영(주)

Ⅲ		감리단 보고내용

□ 가설교량 하부 녹분진 방지망 설치

➀ 보고사유

- 교통우회용 가설교량 하부 주변상가 및 주차장을 이용하는
시민들로부터 녹분진으로 인한 민원발생

➁ 현황사진

➂ 주요수량 증·감 현황

구분	규격	단위	수량		증·감	비고
			당초	변경
녹분진 방지망 설치	수직보호망 (3300d)	㎡	-	1,079	증)1,079

➃ 공사비 증·감 현황                             (단위 : 천원)

구 분		당초	변경	증·감	비고
도급비	녹분진 방지망 설치	-	13,365	증)13,365
	총 계	-	13,365	증)13,365

※ 산출단가(표준품셈) : 협의율[(69.747+100)/2 = 84.874%] 적용

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 민원해소를 위해 녹분진 방지망을 설치하는 것은 적정한 것으로 판단되는바, 향후 설계변경시 반영 조치하고자 함.

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.