문서번호	서울숲공원관리사무소-2861
결재일자	2015.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	서울숲공원관리사무소장
김병수		최원아	05/15 송동명
협조

서울숲공원 수변휴게실 내부정비공사 설계변경(정산) 보고

2015. 5.

동부공원녹지사업소

서울숲공원관리사무소

서울숲공원 수변휴게실 내부정비공사 설계변경(정산) 보고

서울숲공원내 수변휴게실 내부정비 공사가 마무리되어, 설계변경(정산)처리하고 공사완료코져 함

□ 공 사 명 : 서울숲공원 수변휴게실 내부정비공사

□ 공사기간 : 2015. 3. 10 ~ 5. 18

□ 도급금액 : 금일천구백팔십사만원(\19,840,000)

□ 시 공 사 : ㈜유엠컴퍼니 대표 김현정

□ 설계변경(정산)내용

○ 벽   체 : 칸막이벽 추가설치로 인한 물량증가

- 벽체틀 64,45㎡ → 81.25㎡, 석고보드 64.45㎡→98.05㎡

○ 도  장 : 칸막이벽 추가설치로 인한 물량증가 49.75㎡ → 83.35㎡

○ 폐기물 : 전시실 창고에 보관중인 이동식칸막이 폐기물처리로 인한 물량증가

○ 보 험 료 : 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 미납으로 감액처리

○ 준공청소 : 미실시로 감액처리

○ 변경금액

(단위: 원)

구분	변경전	변경후	증감
공급가액	18,036,363	19,828,664	증 1,792,301
부가세	1,803,637	1,982,866	증 179,229
총공사비	19,840,000	21,811,530	증 1,971,530

□ 추진실적

○ 2015. 3. 10 : 공사착공

○ 2015. 5. 15 : 공사완료

□ 향후계획

○ 설계변경후에 정산금액으로 최종 준공처리 하겠음.

붙 임 : 1. 준공사진 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.