문서번호	시설과-3329
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
곽순길	국중연	박형중		05/18 강홍빈
협 조
	학예연구부장		박현욱
	총무과장		연규승
	전시과장		代김양균

백인제 가옥 관람 및 운영을 위한 환경개선 계획

2015. 5.

서울역사박물관

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	서울시 문화재 현상변경 심의 위원회
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

백인제 가옥 관람 및 운영을 위한 환경개선 계획

가회동 백인제 가옥을 역사가옥전시관으로 조성하여 일반 시민에게 개방하기 전 관람환경 개선 및 관리운영을 위하여 기와 고르기, 대피소 입구 정비, 사무동 환경개선 등을 실시코자 함.

Ⅰ		현 황

□ 위    치 : 종로구 가회동 93-1 외 1필지(市 민속자료 제22호)

□ 규    모

○ 대지면적 : 2,600㎡

○ 연 면 적 : 545.52㎡(안채 189.98㎡, 사랑채 63.08㎡,

중문간채 101.90㎡, 별당채 29.76㎡, 별채 33.13㎡,             대문간채 46.17㎡, 관리동 17.42㎡, 사무동 64.08㎡)

Ⅱ		문제점 및 추진방향

□ 지붕 숫기와 내부 홍두깨흙 유실 및 와구토 탈락으로 낙하 위험이  상존하고 기와 배열이 흐트러질 우려가 있음.

⇒ 기와고르기(약 10%) 및 와구토 탈락 방지 : 대문간채, 중문간채, 안채, 별당채, 사무동

□ 대피소(안채뜰) 입구 턱과 덮개가 돌출되어 관람 동선에 지장을 주고 안전사고 위험이 있음

⇒ 대피소 입구를 마당높이와 일치되도록 콘크리트 턱을 낮추   고 덮개를 철재로 설치

□ 사무동 내부 공간이 협소하고 창호, 벽, 바닥이 훼손되어 있음

⇒ 안방과 주방사이 벽을 철거하고 창호지, 벽지, 장판을 교체

□ 사무동 출입문 옆 담장이 낮아 침입 우려가 있고 중문간채 뒤, 관리동 옆, 사무동 양측에 담과 건물 외벽사이 공간이 있어 관람자 출입 우려와 미관을 저해하고 있음.

⇒ 침입 방지를 위한 홍살 벽체 및 차폐 가능한 판문 등을 설치

Ⅲ		추 진 계 획

□ 대 상 지 : 백인제가옥

□ 기    간 : 2015. 5. 31까지

□ 주요 추진내용

○ 백인제 가옥(가회동 93-1)

- 기와고르기(약10%) : 대문간채, 중문간채, 안채, 별당채

- 대피소 입구 콘크리트 턱 정비 및 덮개 설치 : 안채뜰

- 판문 2개소 설치 : 중문간채 뒤, 관리동 옆

○ 사무동(가회동 102-1)

- 기와고르기(약 10%)

- 내부 안방과 주방사이 벽체 철거 및 창호지, 벽지, 장판 교체

- 판문(양 옆 담장과 외벽사이) 및 홍살 벽체 설치(담장 위)

□ 방    법 : 수의계약

□ 소요예산 : 22,000천원

○ 예산과목: 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람지원기반 구축, 백인제가 하우스 뮤지엄 조성 및 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		추 진 일 정

□ 2015. 4월   : 백인제 가옥 시설 인수,

관람시설 조성을 위한 현장점검 및 문제점 도출

□ 2015. 5. 4. : 서울시 문화재 현상변경 허가(역사문화재과, 원안 동의)

□ 2015. 5. 12. ~ 5. 15 : 추진계획 수립 및 공사발주

□ 2015. 5. 31 : 공사준공

붙임: 1. 현상변경 내용(건축) 1부.

2. 현상변경 허가서 사본 1부. 끝.

책임운영기관 성과지표  13.관람환경의 적정성

14.고객만족도