투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(성암로 병목구간 개선공사)

우리 본부에서 추진중인 「성암로 병목구간 개선공사 」와 관련하여 도로포장 공사 시기 미도래로 인하여 관급자재 납품기한 연기를 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

관급자재계약현황					납품기한 연기		비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	당초	변경
아스팔트콘크리트	BB-3,t25mm,3등급,기층용	톤	240	12-14-1-22545-00	2015-5-23	2015-12-31
	WC-2,t13mm,3등급,표층용	톤	765
	BB-2,t30mm,3등급,기층용	톤	556

끝.

	토목부장
주무관	김동현		교량건설과장	이동훈		토목부장	05/18 노우성
협조자
시행	토목부-10116	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개