문서번호	도로포장연구센터-797
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
최향숙		박희석	05/18 권영찬
협 조
	주무관			박대근
	주무관			김태우
	주무관			윤진성

도로포장상태 조사·분석 주간보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로포장상태 조사·분석 주간보고

【 2015. 5. 18(월). ~ 2015. 5. 24(일).】

□ 주간 실적 및 계획

장비명	조사·분석자	구 분 (세부내용)		조사·분석					비고
				총계획물량	실 적		잔여 물량	금주계획
					전주	누계
합 계		로드스캐너	개소	87	2	5	82	5
			연장(km)	1,776	67.1	182.3	1,593.7	100
		휴대용GPR	개소	50	-	15	50	1
			연장(m)	2,500	-	14,386	2,500	100
		FWD	개소	65	4	13	61	1
			연장(m)	35,520	3,190	6,302 (309점)	32,330	1,400
로드 스캐너	강미혜외5 (기간제근로자)	3년 주기 전수조사 (2단계-‘15년도)	개소	87	2	5	82	5
			연장(km)	1,776	67.1	182.3	1,593.7	100
휴대용 GPR	윤진성외2	취약지점 (일반 동공·침하)	개소	50	-	-	50	-
			연장(m)	2,500	-	-	2,500	-
		기 타 (도로관리과, 사업소 요청사항 등 )	개소	-	-	15	-	1
			연장(m)	-	-	14,386	-	100
FWD	윤진성외2	장기 공용성 평가(LTPP) 구간	개소	23	4	4	19	1
			연장(m)	33,420	3,190	3,190	30,230	1,400
		지속관리 (2회이상 동공·침하)	개소	42	-	-	42	-
			연장(m)	2,100	-	-	2,100	-
		기 타 (도로관리과, 사업소 요청사항 등)	개소	-	-	9	-	-
			연장(m)	-	-	3,112 (309점)	-	-

□ 특이사항(동공, 침하 등) 및 조치계획

○ 특이사항 발견치 못함

○ 로드스캐너 조사결과 입력 및 자료분석 철저

○ 휴대용 GPR 및 FWD 계획물량 조사·분석 신속히 이행

○ 장비운행 안전강화로 교통사고 예방

붙임 : 1. 도로포장 표면조사·분석 업무일지 【기간제근로자별 각 1부.(주간)】.

2. 도로포장 하부상태 조사일지 2건.  끝.