함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 통수관련 향후 추진일정 통보 및 협조요청

봉은배수지 통수추진과 관련하여 향후 추진일정을 아래와 같이 알려드리니 관련부서에서는 통수에 차질이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 봉은배수지 통수 추진일정

- 학동로 D1000 세척 및 최종 수질검사	’15. 5. 27.

- 총괄 홍보계획 최종 검토	5. 28.

- 봉은배수지 급수구역 1단계(1, 2구역) 수계분리	6.1.~5.

- 봉은배수지 담수	6. 8.

- 봉은배수지 통수 개시	6.10.

◈ 향후 계획

- 1, 2단계 통수 완료 이후, 급수운영 이상 없을시 3단계 통수추진

※ 향후 추진일정은 1단계 통수 이후 별도 통보.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),암사아리수정수센터소장,기전설비과장
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	05/19 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-3363	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개