문서번호	토목부-10341
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	05/19 노우성
협조

보도 및 자전거도로 변경 설치 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

2015. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

보도 및 자전거도로 변경 설치 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

보도 및 자전거도로 관련지침의 변경 및 유지관리기관(강동구) 협의
결과를 반영하여 폭과 재질을 변경하여 설치코자 검토 보고 드림

■ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012. 8. 2. ～ 2015. 6.30.

○ 도 급 비 : 18,242백만원

○ 시 공 사 : ㈜ 신성건설외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜ 도화엔지니어링외 1개사

■ 설계현황

○ 위치도(본선구간)

- 보    도(투수블럭) : 아남아파트 앞 2m, 롯데아파트 앞 1.5~1.8m

- 자전거도로(아스콘) : 아남아파트 앞 2m, 롯데아파트 앞 1.2~1.5m

○ 위치도(강일삼거리)

- 보    도(석재타일) : 양 방향 3.5m

- 자전거도로(아스콘) : 양 방향 1.5m

■ 관련 근거(첨부)

○ 보도포장(재질)지침 : 보도환경개선과-3824호(15. 3.24.)

○ 보도· 자전거도로 폭과 설치위치 : 강동구 교통행정과-17360호(‘15. 4.20.)

■ 검토 내용

◦ 보도 및 자전거도로 설치 폭을 자치구 협의결과를 반영하여 변경

(단위 : m)

구 분		당 초		변 경		비 고
		보도	자전거도로	보도	자전거도로
암사IC ~정수장사거리	좌	1.95 (투수블럭)	-	1.95 (투수블럭)	-	변경없음
	우	2.0 (투수블럭)	1.85 (아스콘)	2.0 (투수블럭)	1.85 (아스콘)
정수장사거리 ~명덕초교 입구	좌	2.0 (투수블럭)	2.0 (아스콘)	2.8 (투수블럭)	1.2 (아스콘)	아남아파트앞
	우	1.5 (투수블럭)	1.5 (아스콘)	1.8 (존 치)	1.2 (아스콘)	롯데아파트앞
명덕초교 입구 ~훈련원사거리	좌	2.0 (투수블럭)	-	2.0 (투수블럭)	-	동부기술교육원
	우	1.8 (투수블럭)	1.2	1.8 (존 치)	1.2 (아스콘)	롯데아파트앞

◦ 강일삼거리 구간에 설계되어 있는 석재타일 블럭을 지침에 적합하게 투수 블럭으로 변경

(단위 : m)

구 분		당 초		변 경		비 고
		보도	자전거도로	보도	자전거도로
강일삼거리	좌	3.5 (석재타일)	1.5 (아스콘)	3.5 (투수블럭)	1.5 (아스콘)
	우	1.8 (석재타일)	1.5 (아스콘)	3.5 (투수블럭)	1.5 (아스콘)

◦ 공사비 검토 현황 : 붙임 참조

■ 감리단 검토의견

◦ 투수블럭 하부층은 관련지침에서 정해진 기층재료(보조기층 → 투수기층) 및 투수시트, 줄눈재, 유공관 등을 반영 시공토록하고, 투수기층은 생산업체가 단일업체이므로 물가자료에 등재된 업체의 단가를 적용

◦ 강일삼거리에 석재 타일로 시공토록 되어 있으나 불투수 포장으로 서울시 보도공사 설계·시공 지침과 같이 침수피해, 물고임으로 인한 보행 불편, 열섬 현상 등에 유리한 투수 블록 포장으로 시공

◦ 유지관리부서(강동구) 요구사항 반영 시공

- 보도 폭 및  위치 조정 시공

- 자전거도로 추가 : 대우·아남아파트 앞

◦ 위 사항 반영에 따라 증가되는 공사비에 대하여는 추후 설계 변경시 반영 코자 함.

■ 공사시행 협의

○ 우리시 : 신규 공종에 대하여 낙찰율 80.405% 적용

○ 도급자 : 신규 공종에 대하여 100% 반영 요청

■ 조치의견

○ 감리단 검토의견대로 승인하여 공사 시행하고 추후 설계변경시 반영함이 타당하다고 사료됨

○ 금회 실정보고건은 공사 시행 협의 하였으나 협의가 되지않아 부득이 신규 공종에 대하여 공사계약일반조건 제20조2항에 따라 강제협의율(90.202%)을 적용코자 함.

- 개략공사비 : 증) 24백만원

붙  임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부

2. 공사비 현황 1부

3. 관련공문  2부

4. 공사시행 협의문서 사본 1부.  끝.