함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	용역기간 변경에 따른 계약변경 의뢰

1. 우리 본부에서 시행하고 있는 “상수도공사 (급수,누수복구) 시공감독업무 위탁용역(장기계속계약)”을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명  : 상수도공사 (급수,누수복구)시공감독업무 위탁용역                          (장기계속계약)

나. 용역업체 : ㈜ 이준엔지니어링외 1개사,  대표 이방열외 1인

다. 총 부기금액 : 9,131,891,000원 (3차수 162,872,000원)

라. 용역기간

- 당초 : 2013. 5. 25 ~ 2015. 5. 24

- 변경 : 2013. 5. 25 ~ 2015. 6. 21

바. 연기사유 귀책사유 : 상수도사업본부

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 연기사유 : ’15년 용역발주에 따른 검토부서와의 협의지연에  따른 발주 지연으로, 신규업체의 착공시기까지 용역기간 연기

붙임 : 용역기간 연기에 따른 실정보고 방침 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	김형준		급수설비과장	김기상		급수부장	05/19 이규상
협조자
시행	급수설비과-3394	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1474	/전송	02-3146-1429	/	doksule@seoul.go.kr	/	대시민공개