문서번호	설비부-5888
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
조기성		임현근	05/19 박기형
협조

『양천주민편익시설 증축 및 리모델링 공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

도시기반시설본부

(설비부)

『양천주민편익시설 증축 및 리모델링 공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행 중인『양천주민편익시설 증축 및 리모델링 공사』와 관련, 관급자재 설치시기 미도래에 따른 납품기한 연기 검토결과를 보고 드림.

공사개요

❍ 공 사 명 : 양천주민편익시설 증축 및 리모델링 공사

❍ 위    치 : 양천구 목동 900번지

❍ 규    모 : 지하3층/지상3층, 연면적 5,841㎡

❍ 공사기간 : 2014. 12. ~ 2016. 06.

❍ 시 공 사 : 라신산업(기계), 유진전기(전기), 네오티스(통신)

❍ 총사업비 : 12,658백만원(기계 2,321, 전기 964, 통신 262)

관련근거

❍ 2015. 05. 15 :  건설사업관리단 관급자재 납기연장 요청(양천2015-048)

관급자재 계약현황

구 분	납품요구번호	계약자	계약금액	납품기한		비 고
				당 초	변 경
공기순환기	121521346300	은성화학(주)	49,251,560원	2015. 05. 30.	2016. 05. 31.
물 탱 크	121521223300	㈜세진에스엠씨	13,367,000원	2015. 06. 09.
냉난방기	121521345700 121521345800	LG전자(주)	9,216,620원 964,000원	2015. 07. 30.
태 양 광	121521443200	㈜에너솔라	76,050,000원	2015. 09. 03.
승 강 기	121521535100	㈜금영제너널	45,133,220	2015. 09. 29.

※ 당초 납품기한을 2016. 5. 31으로 요청하였으나 조달청과 업체와의 (연중)단가계약 체결 시 위와 같이 계약기간이 지정(당초) 됨.

감리 연기검토 보고

❍ 연 기  사 유 : 선행공정인 건축공사 진행에 맞게 조정(현 공정율 11%) 및  관급자재 설치시기 미도래

❍ 납품기한 연기 : 2016. 05. 31.

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

보고자 의견

❍ 관급자재의 납품기한 연기가 타당하므로 납기를 연기조치하고 공정관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 건설사업관리단 관급자재 납기연장 요청 공문 1부.