투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	물품계약 변경체결 통보(국악예술당 기계설비 - 자동제어설비)

1. 설비부-5756(2015.5.14)호와 관련입니다.

2. 귀 부서의 조달물품계약 변경 요청건에 대하여 다음과 같이 변경  체결되었음을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.  계약건명  : 자동제어설비 구매･설치(국악예술당건립 기계설비공사)

나. 변경계약체결 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
계 약 자	로지시스템㈜ (대표자 : ***)	변경없음
계약금액	152,020,000원	변경없음
납품기한	2015. 5. 22.	2015. 10. 16.

붙임  변경계약서 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	조성익		경리과장	허금도		건설총괄부장	05/19 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-9808	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2376	/전송	02-3708-2327	/		/	부분공개(6)