문서번호	도로보수과-3237
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이민호	박일연	김환겸		05/19 송상영
협 조

지하철 9호선 2단계(915~917공구)구간

합동점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.

동 부 도 로 사 업 소

도 로 보 수 과

「지하철 9호선 2단계(915~917공구) 공사구간」

합동점검 결과보고

지하철 9호선 2단계(915~917공구) 공사구간에 대한 관련기관 합동점검을 실시하고 아래와 같이 그 결과를 보고 드림.

	1		점 검 개 요

점검위치 : 차관아파트사거리 ~ 종합운동장사거리

점검기간 : 2015. 5. 18(월) 14:30 ~ 17:30

점검방법 : 도로관리과, 동부, 도기본 관계자 합동점검

점 검 자 : 총15명

○ 도로관리과 담당직원 1명

○ 동부 도로보수과장 및 담당직원 2명

○ 도시기반시설본부 담당과장 2명 및 담당직원 3명

○ 공구별 감리단장 3명 및 현장소장 3명

중점점검사항

○ 포장도로 평탄성 및 배수상태, 도로소파, 침하등

○ 맨홀주변 침하 및 파손여부, 맨홀시공상태등

	2		점 검 결 과

공구별 점검결과

공구별	계	도로파손 및 불량	도로침하	맨홀주변 파손	맨홀인상
계	37	5	3	3	26
915공구	12	5	1	2	4
916공구	21			1	20
917공구	4		2		2

공구별 점검내용

○ 915공구 점검내용

- 시공사인 경남기업이 법정관리진행중으로 보수조치가 어려운 실정으로         도시기반시설본부에서 건설공제조합을 통하여 6월 10일 이전

완료 예정.

○ 916공구 점검내용

- 점검결과 지적된 사항에 대해 5월말까지 조치완료 예정

- 정거장 구간인 삼성중앙역사거리, 봉은사역사거리구간은 지반보강         시행중에 있음

- 삼성중앙역사거리는 6월 20까지 포장복구 완료 예정

- 봉은사역사거리는 8월말까지 포장복구 완료 예정

○ 917공구 점검내용

- 점검결과 지적된 사항에 대해 5월말까지 조치완료 예정

	3		조 치 의 견

○ 지하철 9호선 2단계 공사장 점검결과 지적사항에 대해 도시기반시설본부에 보수토록 조치 통보

○ 지하철 9호선 2단계 공사구간 지속적인 도로순찰 강화

○ 향후 916공구 정거장구간에 대해서는 포장복구가 완료된 시점에 별도 합동점검 시행

따로붙임 1. 합동점검결과 현황 1부.

2. 위치도 및 사진대지 1부.  끝.