문서번호	기전과-4885
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	북부도로사업소장
백윤광		이영목	05/19 이승진
협조

『북악·구기터널 조명개선공사』

공 사 발 주  계 획 보 고

2015. 5

북부도로사업소

(기전과)

『북악·구기터널 조명개선공사』

공 사 발 주  계 획 보 고

밝고 쾌적한 도로환경 조성을 위하여 추진하고 있는 2015년 도로    시설분야 도로조명 개선사업 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리규정(서울시 훈령 제942호)

□ 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획(부시장방침 86호 2013. 2. 26)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 북악, 구기터널 LED조명 개선공사

□ 사업위치 : 성북구 정릉로 49(북악), 종로구 진흥로 419(구기)

□ 사업대상

□ 터널연장 : 북악터널 810m, 구기터널  610m

	입․출구부	기본부
북악터널	NH250W × 446등	LED직관형(22W/3) × 420등
구기터널	NH250W × 442등	형광등(32W/3) × 290등

□ 시설현황 :

□ 개선방안

□ 개선대상 : 북악터널 → 나트륨 446등,

구기터널 → 나트륨 442등, 형광등 290등

□ 개선방법 : 기존나트륨, 형광등을 LED등으로 교체

□ 추진방법 : 실시설계 용역 시행 이후 도급공사 발주

□ 사업예산 : 381백만원

구분	계	도급(관급자재비포함)	설계용역비
사업비	381,000천원	366,000천원	15,000천원

□ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도시개발특별회계,

도로시설분야조명설비개선공사, 시설비(401-01)

Ⅲ		발주계획

□ 설계용역 시행 : 수의계약

□ 계약대상 : 동양티피티(주) 유태완

□ 사    유 : 터널 및 지하차도 기전시설물 설계경험이 풍부한 업체이며 설계용역

금액이 소액임.(지방자치단체계약에관한법률시행령 제25조1항5호)

Ⅳ		향후계획

□ 2015. 5.~ 6. : 실시설계용역

□ 2015. 7.~10. : 공사시행

끝.