보고서(시공계획서 및 설계도서 검토)

★주무관	급수운영과장			결재
양윤선	05/19 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-12090

「성동,광진구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사」 감독업무 수행에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 5. 19.

****************************

제목 : 시공계획서 및 설계도서 검토보고

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 성동,광진구관내 상수도시설물설치 및 보수공사

(장기계속단가계약)

나. 공사기간 : 2015.5.8.~2016.5.31

다. 도 급 액 : 664,582,140원

라. 공사개요 : 밸브교체 : 186개소, 기아박스점검 및 정비 : 74개소

마. 도급업체 : ****************

2. 보고내용

위 공사와 관련하여 제출된 시공계획서 및 설계도서 검토에 대한 보고임.

가. 시공계획서

구 분		검 토 내 용	지시내용
공정계획	세부공정표 및 일일작업공정	적정함.	공사일정이 변경될 경우 세부공정표를 작성하여 제출
현장조직	현장대리인 적정여부	현장대리인은 건설산업기본법 시행령 제35조 제2항 별표5에 의거 30억미만 공사의 책임자 토목초급기술자로서 해당공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년이상 종사한 자로 적정함.	자격이 적정하며 현장 상주토록 지시
현장조직	비상연락체계의 적정성 여부	확인결과 적정함.	민원발생시 긴급조치가 가능토록 조치
	안전관리자 선임여부	산업안전보건법 제15조 시행령 제12조에 의거 건설업 120억원(토목공사 150억원) 이상이거나, 상시 근로자수 300명 이상인 경우 동법시행령 별표3 기준에 해당되는 안전관리자 선임토록 규정하는 바, 본 공사에는 의무사항은 없음.	안전담당자로서 현장대리인이 겸임 가능함.
품질관리	품질관리자 선임여부	건설기술진흥법 시행령 89조에 의거 총공사금액이 2억이상의 전문공사로 초급품질 관리대상의 공사로 품질시험계획 수립대상 초급기술자 1인 대상으로 적정함. ********************	-품질관리에 만전을 기할 것을 지시
	품질관리 계획 적정여부
시공계획	구간별 현장여건을 고려한 시공계획여부	현장여건에 맞게 작성됨	현장여건이 상이한 경우 실정보고 및 감독승인을 득한후 공사시행
안전관리	안전관리 계획 적정여부	작업자 안전교육 계획 및 유형별 안전관리 계획 적정함.	지하 매설물 발견시 관리기관의 사전협조
교통소통 대책	교통처리계획 적정여부	안전관리시설 설치계획 수립 적정 교통안전시설 보유현황 적정	보행자 통로 확보 교통안전원 배치 철저 시민 불편사항이 발생하지 않도록 관리철저
환경관리	환경관리계획 적정여부	분진방지 저감방법 시행 소음저감 공법 적용	민원예방을 위해 친환경공법 적용철저

나. 설계도서 검토보고

구 분	검 토 내 용
설계서와 현장여건의 부합여부	본공사는 예정물량에 따라 설계된 연간단가 공사이므로 향후 작업지시에 따라 신규공종 발생등 변동사항에 따라서 추후보고 예정임.
2. 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역 서등의 내용에 대한 상호일치 여부
3. 설계서의 누락, 오류여부	특이사항 없음
4. 물량내역서와 산출내역의 수량일치 여부	특이사항 없음

3. 행정사항

위와 같은 내용으로 착공신고서 및 직접시공계획서를 검토후 보고함.  끝.