투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(총괄2회,2차1회) 시행에 따른 변경계약 의뢰

1. 우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(신청담)에  대하여 아래와 같이 설계변경(총괄2회,2차1회)에 따른 변경계약을 의뢰하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(신청담)

나. 계약기간 : 2013. 04. 25 ∼ 2015. 12. 20(총괄)

2015. 01. 21 ∼ 2015. 12. 20(2차)

다. 계약금액 : 8,410,690,000원(총괄)

라. 도 급 자 : 한양산업개발주식회사  대표 이왕섭

마. 설계변경 사유

- 수량변경 및 기타사항 반영(수량 증·감 내용 보고서 별첨)

바. 설계변경 금액                                            (단위:천원)

구 분	총 괄(2회)			2차(1회)			비고
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
도 급 비	8,410,690	8,410,690	-	2,000,000	2,000,000	-

사. 예산과목 : 한강공원이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선,         한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(100-401-01)

첨부 :  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경사유서(총괄2회, 2차1회) 1부.

3. 설계변경내역서(총괄2회) 1부.

4. 설계변경내역서(2차1회) 1부.  끝.

	치수과장
주무관	방호익		치수과장	05/19 김용제
협조자	주무관	박정태
시행	치수과-1731	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개