문서번호	도시철도사업부-4406
결재일자	2015.5.19.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	경전철2과장	도시철도사업부장
신익현	代임병관	05/19 이은상
협 조
	공사지원과장		김창기
	설비계획과장		강재천
	시설전기과장		서태창
	주무관		안창호

- 우이 ~ 신설 도시철도 민간투자사업(2공구) - 제7차 전면책임감리용역 발주계획 보고

2015. 5

도 시 철 도 국

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	▣
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	▣
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	▣
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	▣
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	▣
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	▣
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	▣
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	▣
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	▣	□

-  우이 ~ 신설 도시철도 민간투자사업(2공구) -

제7차 전면책임감리용역 발주계획 검토보고

우이～신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 건설공사(2공구)와 관련한 전면책임감리용역에 대한 제7차 발주계획에 대한 검토 보고임.

용역개요(총괄)

○ 용 역 명 : 우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

○ 용역기간 : 2009. 01. 07 ~ 2017. 01. 31

○ 공사개요 : 총연장 3,233m(개착 1,977m, 터널 1,007m, 정거장 4개소)

○ 용역금액 : 3,827,090천원

○ 계 약 자 : ㈜유신 외 3개사

발주계획

○ 관련근거 :  토목부-4687(2015.3.10.), 유신 감리15-841호(2015.5.18)

○ 건    명 : 우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)(7차)

○´15년 예산액 : 591,080천원

○ 발주내역

(단위 : 천원)
구 분	총 괄	기 계약(1차~6차)	금회(7차)	장 래
용역비	3,827,090	2,760,700	591,080	475,310

○ 과업기간(7차) : 2015. 05. 21 ~ 2016. 02. 07

○ 과업분야 : 우이~신설 도시철도 민간투자사업(2공구)의 토목, 건축, 기계설비,전기(정거장)분야에 대한 전면책임감리

○ 예산과목(계 591,080천원)

- (특별회계)신교통수단도입, 경전철건설사업, 우이~신설지하경전철, 시설비및부대비, 감리비 : 425,000천원

- (일반회계)도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 공사장안전관리대책추진, 시설비및부대비감리비 : 166,080천원

○ 계약방법 : 장기계속공사(용역)

○ 투입계획

구 분			투입일자(계획)	비 고
토 목	책임감리원	감리사(1인)	´15.05.21 ~ ´16.02.07
토 목	보조감리원	감리사보(1인)	´15.05.21 ~ ´15.06.30
토 목		감리사보(1인)	´15.05.21 ~ ´16.02.07
토 목		감리사보(1인)	´15.05.21 ~ ´16.02.07	안전전담
토 목		감리사보(1인)	´15.05.21 ~ ´16.02.07	지중전담
건 축		감리사(1인)	´15.05.21 ~ ´16.02.07
기 계		감리사보(1인)	´15.05.21 ~ ´16.02.07
전 기		중급감리원(1인)	´15.05.21 ~ ´16.02.07

조치계획

○「우이~신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)」의 원할한 사업추진과 정상적인 공정추진을 위하여 7차 용역발주를 시행하고자 함.

- 용역기간 : 2015. 05. 21 ~ 2016. 02. 07

- 발주금액 : 591,080천원

붙   임 : 1. 관련문서(감리단) 1부

2. 전면책임감리용역(2공구,제7차) 발주서류 각 1부

3. 상주보조감리원(전기분야) 변경투입 승인알림 1부

4. 2015년 전담감리원 선정위원회 선정결과 확정통보 1부. 끝.