문서번호	방재시설부-6715
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이성하		김흥근	전결 05/19 임춘근
협 조

- 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

준공기한 연기 검토보고

2015. 5

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

준공기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행중인 「합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사」공기연장에 대한 검토보고서가 위탁감독기관인 서울특별시시설관리공단으로 공문 접수되어 이에 대한 검토보고

□ 관련문서

□ 서울시설공단 공사감독1처-4203호(‘15.5.15) : 공사계약기간(3차) 변경 검토보고서 제출

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사

□ 공사위치 : 마포구 합정동 196-4, 마포구 성산동 99-5 일원

□ 공사규모 : 빗물펌프장 증설 2개소(합정펌프장, 중동펌프장)

□ 공사기간 : 2013. 1. 4 ~ 2016. 4. 30

□ 도 급 비 : 5,093,587천원

□ 시공사/감리사 : (주)금강주택 / 서울시설관리공단

□ 시설관리공단 보고사항

《준공기한 연기》

□ 연기내역

구분	당 초	변 경	비 고
총차	2013.01.04 ~ 2016.04.30	2013.01.04 ~ 2016.04.30	변경없음
3차	2014.04.01 ~ 2015.5.30	2014.04.01 ~ 2015.12.31	216일 연기
4차	2014.12.17 ~ 2015.12.31	2014.12.17 ~ 2015.12.31	변경없음

□ 연기사유

- 합정빗물펌프장 공사부지 확보 지연 및 재설계 추진

□ 검토의견

- 계약기간 연기 적정성 여부 : 적정

- 계약기간 연기일수 적정성 여부 : 적정

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 검토사항 및 조치의견

□ 준공기한 연기사유

- 저촉건물 건물주의 중토위 이의재결 신청 및 미이주

- 열악한 연약지반 및 공사장 인접 노후건물의 초인접으로 펌프장 공사시 안정성 확보를 위한 보완설계가 불가피하여 사업기간 연기

□ 위 연기사유로 인해 3차계약공사가 지연되고 있어 준공기한 연기는 적정하다고 판단되는 바, 계약 부서에 연기 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고함.

붙임 : 1. 공단 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝