문서번호	시설관리과-12568
결재일자	2015.5.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
문강수		정임근	05/19 오기석
협 조

‘15년 전기방식공사 실정보고

2015. 5.

동부수도사업소

(시설관리과)

전기방식공사 실정보고

『’15년 상수도관 비방식관로 전기방식공사』에 대한 공사 실정보고가 접수되어 아래와 같이 검토 보고하는 사항임.

□ 관련근거

○ 설계도서 등 검토 보고[윤영중·관리 제 152-005호(2015. 5.18.)]

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 상수도관 비방식관로 전기방식공사

○ 계약금액 : 금200,515,700원(금이억오십일만오천칠백원)

○ 공사기간 : 2015. 05. 06. ∼ 2015. 10. 02

○ 공사업체 : 건양전기주식회사

○ 공사개요

- 정류기 및 저항 BOX : 2set

- 양극홀 설치 : Ф200 × 5

- 전기인입 및 배관, 배선공사 1식 : 2개소

□ 실정보고

구 분	문제점	보고내역(감리단)	검토의견
정류기위치 변경	서울시 디자인 심의 및 구청 점용허가 조건에 따른 정류기 위치 변경으로 기존 위치에 정류기 설치가 불가함.	자양동 : 학교 앞에서 아파트 앞으로 정류기 위치변경 및 양극홀 위치 변경 구의동 : 시설물주변에 모아서 설치(디자인심의결과)	원안시행 (승인)

□ 처리의견

상기와 같은 사항을 검토결과와 같이 승인하여 공사시행 및 설계변경 시 반영토록 공사감독기관인 감리단[(주)윤앤영이앤씨]에 통보하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 변경후 도면 2부

2. 변경전 도면 2부.  끝.