문서번호	정보자원운영과-1720
결재일자	2015.5.19.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정보자원운영과장		데이터센터소장
임연주	임하정	김영숙		05/19 이계헌
협 조
	기획관리과장		이강옥
	인터넷통신과장		김진하

- 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 -

사업(계약방법) 변경 추진 계획

2015.  5.

데이터센터

(정보자원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 -

사업(계약방법) 변경 추진계획

『서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립』 사업에 대하여 협상에의한 계약방식으로 입찰(2회) 실시한 결과 최종 유찰됨에 따라 계약방법을 변경하여 사업자 선정를 선정하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제26조

□ 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 계획

(정보자원운영과-792,2015.3.6)

□ 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 계약-내부품의 (정보자원운영과-1072,2015.3.26)

□ 입찰공고 2회 유찰통보 (재무과-23614, 2015.5.6.)

Ⅱ		사업 개요

□ 사 업 명 : 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립

□ 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월(180일)

□ 사 업 비 : 197,262천원

□ 사업내용

❍ 클라우드센터(17~19층) 공간별 운영계획 수립

- 5개 시스템실, 사무공간등 전반적인 공간별 운영방안 마련

❍ 클라우드센터 운영을 위한 기본 인프라 설계

- 네트워크, 전기, 정보보호, 클라우드시스템 등 기본 인프라 설계

❍ 서울시 5개 전산실 통합 및 이전계획 수립

- 서울시 백업센터, 시민봉사담당관, 교통정보과, 상수도사업본부, 역사박물관

❍ 서울시 데이터센터의 중장기 발전계획 수립 등

- 클라우드 센터 중장기 로드맵 제시 및 경제성 분석 등

Ⅲ		추진 경과

□ 2015.3.12~3.19	: 제안요청서 검토

□ 2015.3.19~3.23	: 사전공고

□ 2015.3.27~4.24	: 입찰공고

❍ 개찰결과 : 유찰 (사유 : 단독응찰, 참여업체 : 팬톰(주) 컨소시엄)

□ 2015.4.3(금)	: 사업설명회

□ 2015.4.24~5.6	: 입찰 재공고

❍ 개찰결과 : 유찰 (사유 : 단독응찰, 참여업체 : 팬톰(주) 컨소시엄)

Ⅳ		변경추진 계획

□ 사 업 명 : 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립

□ 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월(180일)

□ 변경내용

❍ 계약방법 변경

변 경 전	변 경 후
제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)	수의계약

❍ 변경사유 : 입찰공고 및 재공고 입찰을 실시 하였으나, 단독응찰로 입찰이 성립되지 않아, 적정한 사업자를 선정하여 연내에 사업을 종료하고자 함.

□ 대상업체

❍ 업 체 명 : 팬톰(주) 컨소시엄

❍ 주    소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노파크 15차 603호

❍ 선정사유 : 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 입찰시(2회) 모두 단독 응찰하였으며, 사업설명회에 참석하고 사업 참가 자격에 결격 사유가 없는 업체와 수의계약을 체결하여 사업수행에 만전을 기하고자 함.

Ⅴ		향후 일정

□ 2015. 5. 20(수) : 수의계약 의뢰(기획관리과)

□ 2015. 5. 27(수) : 계약완료

□ 2015. 5. 29(금) : 사업착수

붙임	1. 과업지시서 1부.

2. 산출내역서 1부.

3. 입찰공고 2회 유찰통보서 1부.

4. 입찰관련 서류 2부.