문서번호	교통운영과-9644
결재일자	2015.5.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		신호운영팀장	교통운영과장
장철수		고광섭	05/20 강진동
협조
	실무사무관		김대권

2015년 교통신호제어기 유지보수 용역  부분준공검사 및 결과보고(동북권역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

교통운영과

(신호운영팀)

교통신호제어기 유지보수(동북권역) -

기성부분 준공검사 결과보고

2015년 교통신호제어기 유지보수용역(동북권역)에 대한 제1회 부분준공(기간: 2015.3.10.~4.30)을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 용역개요

❍ 사 업 명 : 2015년 교통신호제어기 유지보수 용역(동북권역)

❍ 사업기간 : 2015.3.10.~2015.12.31

❍ 계약업체 : ㈜진우산전

❍ 계약금액 : 금600,564,210원

❍ 검사방법 : 제1회 부분준공 기간내 수행한 용역 추진실적 점검

□ 과업범위 및 추진실적

❍ 과업목적 : 도봉구, 성북구, 광진구, 중랑구, 노원구, 강북구에 설치·운영중인 교통신호제어기의 정기점검 및 고장신고에 따른 신속한 장애조치로 시민들에게 안전한 교통서비스 제공

❍ 추진기간 : 2015.3.10. ~ 4.30 (2개월-52일)

❍ 시설물 현황 (동북권역)

- 기준 : 2015.4.30. -

교 통 신 호 제 어 기							차 량 검지기	보행자작 동신호기	음 향 신호기	잔여시간 표 시 기
계	표준시스템		전자 시스템	일반		신설
	유선통신	광통신		WCMS	일반
1,010	978	0	5	21	6	2	75	160	1,844	2,011

❍ 민원처리

구분	총계	센터작업	사업소통보	현장작업
3월	99	16	20	63
4월	150	28	13	109
총계	249	44	33	172

❍ 현장작업

구분	총계	온라인	D/B	사업소 이첩	광통신	WCMS	표준화	차량 검지기	S/W 점검	보행자작동신호기	기타
3월	120	72	9	0	0	0	0	0	3	0	39
4월	239	115	25	0	0	0	0	0	0	0	99
총계	359	187	34	0	0	0	0	0	0	0	138

❍ 특별과업

구분	총계	잠금창치	제어기점검 및 환경정비	기 타
3월	76	0	76	0
4월	93	0	93	0
총계	169	0	169	0

❍ 온라인율

구분	2014년	2015년
3월	98.50%	98.80%
4월	98.65%	98.78%
평균(%)	98.58%	98.79%

❍ 기타사항 : 첨부1「제1회 기성추진실적」참조

□ 검사개요

❍ 과업내용 : 제1회 부분준공 기간 내 수행한 추진실적 점검

❍ 과업기간 : 2015.3.10.~4.30(2개월)

❍ 검사일자 : 2015.5.13

❍ 검 사 자 : 장철수주무관, 김대권사무관

- ㈜진우산전  이창원팀장, 이광철사원

□ 검사결과

❍ 성북구 정릉쌍용아파트 등 10개 교차로

- 교통신호제어기 내부 청소상태 및 부품유지 관리 양호

- 사대부중 교차로 교통신호제어기 옆 고무패킹 망실 → 고무패킹 설치

❍ 사대부중 교차로 : 발전기 가동, 효성교회 : 인버터 가동

- 발전기 시동점검 및 출력전압 측정, 유류보유 상태 양호

- 인버터 출력전압 측정 및 장비 보관상태 양호

□ 보고자 의견

❍ 현장검사 결과 적합하게 유지관리 되고 있음으로 교통신호제어기

유지보수 용역에 대하여 부분준공처리 하고자 함.

□ 기성내역

❍ 제1회 부분준공금액 : 금100,937,220원

- 단위 : 원 -

계약금액	기성금액			잔액
	전회기성	금회기성	합계
600,564,210	0	100,937,220	100,937,220	499,626,990

붙임 : 1. 기성 점검표 및 지적사항 조치결과 검수사진 1부.

2. 기성 부분준공신고서 1부.

3. 기성 내역서 갑지 1부.

4. 기성 기성산출내역서 1부.

5. 기성 업무추진실적 1부.

6. 기성 근무상황부 1부.

7. 기성 유류사용내역 1부.  끝.