함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(중랑천 횡단 상수도관 이설공사 건설사업관리용역)

1. 우리 본부에서 시행중인 「중랑천 횡단 상수도관 이설공사 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 중랑천 횡단 상수도관 이설공사 건설사업관리용역

나. 용역기간 : 2014.11.05.~2015.08.04.

다. 도 급 자 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

라. 변경계약 사유 : 물가변동비, 건설사업관리기술자 투입조정 반영

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물(노후송배수관정비), 시설비및부대비(감리비)

바. 변경내역

1)용역비 : 전체분 (당초) 309,129,000원 → (변경) 285,576,000원

1차분 (당초) 250,000,000원 (변경없음)

2)용역기간 : 전체분 (당초) 2014.11.05.~2015.08.04. (변경없음)

1차분 (당초) 2014.11.05.~2015.05.20.

(변경) 2014.11.05.~2015.06.28.

붙임 : 설계변경 시행 품의서 1식. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정연준		시설과장	김인규		시설안전부장	05/20 강신재
협조자
시행	시설과-3495	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1495	/전송	3146-1529	/	jyj135@seoul.go.kr	/	대시민공개