문서번호	총무과-5012
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	상수도연구원장
김승곤	이성철	05/20 정득모
협 조

별관청사 석면철거·환경개선공사및

본관사무실·실험실 정비계획

2015. 5.

상수도연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

별관청사 석면철거·환경개선 및 본관 사무실·실험실 정비 계획

우리연구원 별관 2,3층 석면철거·환경개선 및 본관 미생물과 사무실·실험실 등을 정비하여 쾌적한 근무환경을 조성하고 업무의 효율을 증대하고자 함.

Ⅰ. 관련근거

별관청사 석면철거 :「석면안전관리법」

총무과-11059(2014.11.4.) :「소통하고 공존하는 즐거운      조직 개선계획」

Ⅱ. 정비방향

별관1·3층 석면제거 및 무석면설치로 안전한 연구환경조성

별관 전층 화장실 환경개선

본관 미생물연구과 사무실 통합 및 실험실 유리칸막이 설치

Ⅲ. 정비대상

총괄현황

구분	장소	석면해체	무석면설치 (경량철골)	정 비	비 고
① 별관	3층	220.75㎡	220.75㎡
	1층	658.6㎡	658.6㎡
	지하	17.15㎡	17.15㎡
	밤라이트	5.79㎡
② 별관 화장실	3층			30㎡
	2층			44㎡
	1층			16㎡
③ 본관 미생물검사과	사무실			162㎡
	세균실험실			210㎡

Ⅳ. 추진계획

제1단계 : 별관3층 재료연구과, 물순환연구과  별관1층 수질연구과  임시 사무실로 이전

제2단계 : 별관1·3층 전기, 소방,·통신설비 철거 및 석면해체 후 폐기물 처리

제3단계 : 경량철골 시공 및 전기시설공사

제4단계 : 내부인테리어 시공(무석면설치, 창문정비, 도색 기타)

Ⅴ. 세부추진

1. 본관,별관 설계용역

선정방법 : 2개 회사에 견적의뢰 후 적정업체 선정

소요예산 : 10,000천원

계약방법 : 수의계약(전자시담)

관련근거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률시행령 25조,제30조

2. 본관, 별관 사무실 이전 및 원상복귀

선정방법 : 2개 회사에 견적의뢰 후 적정업체 선정

소요예산 : 10,000천원

계약방법 : 수의계약(전자시담)

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령25조, 제30조

3. 별관 석면해체 후 폐기물 처리

선정방법 : 2개 회사에 견적의뢰 후 적정업체 선정

소요예산 : 20.000천원

계약방법 : 수의계약(전자시담)

관련근거 : 산업안전보건법제38조의4 및 지방자치단체를 당사자로하는

계약에 관한법률 시행령 제25조,제30조

4. 전기공사 : 전등,전열 철거 후 재설치, 분전반 교환, 기타 등

선정방법 : 2개 회사에 견적의뢰 후 적정업체 선정

소요예산 : 10,000천원

계약방법 : 수의계약(전자시담)

관련근거 : 전기공사업법제11조 및 지방자치단체를 당사자로하는                     계약에 관한 법률 시행령 제25조,제30조

5. 별관 무석면 설치, 내부인테리어공사 및 화장실 환경개선, 본관 사무실       및 실험실 정비

계약방법 : 제한경재입찰

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조

소요예산 : 150,000천원

◆ 총공사금액 : 2억원 ◆

본관, 별관 설계용역비 : 10,000천원

본관, 별관 사무실 이전 및 원상복귀 : 10,000천원

본관 사무실 및 실험실 정비 : 60,000천원

별관 석면해체 후 폐기물 처리 : 20,000천원

별관 무석면 설치 및 내부인테리어 공사 : 50,000천원

별관 화장실 환경개선 : 40,000천원

별관 전기공사 : 10,000천원

※예산과목 :

상수도사업비,영업비,일반관리비, 수선유지교체비,시설장비유

Ⅵ.추진방법

① 기술용역 타당성 심사		② 설계용역수행		③ 설계용역보고
(기술심사담당관)		(용역발주)		(용역준공)
④ 계약심사 의뢰		⑤ 공사시행		⑥ 준공처리
(설계서 심사의뢰)		(본청재무관 발주의뢰)		(준공처리보고서 작성)

Ⅶ.현황사진 및 평면도

「별관1층」                       범례:

파랑색선 안 : 석면제거 및무석면설치, 사무실 정비

빨강색선 안 : 화장실 환경개선

별관1층 재료연구실험실	별관 현관 입구	별관1층 화장실	별관1층 수질연구과	별관1층 식당
「별관2층」
별관2층 화장실	별관2층 평면도

「별관3층」

별관3층 재료연구과		별관3층 화장실		별관3층 물순환연구과
별관3층 평면도
「본관1층」
본관 조류응용생물실험실	본관 세균실험실		본관1층 평면도

Ⅷ. 행정사항

인터넷통신망 및 전화 이설등은 본부 전산정보과와 협의 후 진행

공사시행과 관련 사무실 이전시 각 부서에서는 적극 협조. 끝.