문서번호	기전과-3428
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
차준원		05/21 최주용
협조

『2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

감리실정보고서 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05

성동도로사업소

(기 전 과)

『2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

감리실정보고서 검토 보고

2015년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 2차 작업지시에 대한 감리원의 공사 실정보고가 있어 의견 검토후 그 결과를 보고 드림

관련근거

○ ㈜영호이앤씨 영호 본 2015-32호(2015.05.20.)

공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전표지 유지보수공사(연) 2차 작업지시 실정보고서 제출

○ 공사기간 : 2015. 04. 30 ~ 2015. 05. 20

○ 도 급 자 : ㈜대상에프엔씨 조성두

○ 감 리 원 : ㈜영호이앤씨 감리원 김남철

감리원 의견 및 검토결과

○ 변경내용

연번	구분	현황 및 문제점	감리의견	검토결과
1	면목로208	신호기 및 노면표시 미작업	신호기 및 노면표시 미작업으로 공사기간 연장(2015.06.10.)	신호기 및 노면표시 미 작업으로 공사기간 연장하여 공사 완료 하는 것이 타당함.
2	시설관리공단 북단
3	무학로175 롯데캐슬리치 후문

조치의견

○ 실정 보고에 대한 감리원의 의견을 검토한 결과 보고내용에 타당성이 있어 이를

현장여건에 맞도록 기간연장 및 시공토록 감리자에게 지시 하고자 합니다.

붙    임 : 1. 감리 실정보고서 제출 1부. 끝.