문서번호	도로보수과-5024
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
김중철		이규철	05/21 代김영선
협조	주무관		이상하
	주무관		권세봉

2015년

자전거전용차로 정비사업 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

서부도로사업소

(도로보수과)

2015년 자전거전용차로 정비사업 시행계획 보고

우리사업소 관내 월드컵북로 외 3개 노선 자전거전용차로의 노후된 포장도로 및 표지병 ․ 노면표시를 재 정비하고, 시 종점에만 일부 표기된 유색포장을 전면 실시하여 이용시민의 시인성 확보 및 자전거전용차로의 기능을 회복함으로서 시민 고객에게 안전하고 깨끗한 자전거 통행환경을 제공하고자 함

□ 관련근거

○ 2015년도 자전거 이용시설 정비대상 선정 및 사업비 배정 알림

(보행자전거과-3114(2015.3.12.)호와 관련임)

□ 현황

○ 유색포장 : 당초 공사시 시점부와 종점부 일부만 표기되어 있음

○ 노면표시 : 전체적으로 노후되어 재 도색 필요함

○ 포장상태 : 월드컵북로 347 외 3개소는 침하 및 거북등 균열, 포장종균열 등으로 노후되어 자전거도로 정비전 보수가 필요한 실정 임

□ 정비개요

○ 기  간 : 2015. 5월 ~ 2015. 7. 31

○ 사업비 : 151,600천원

○ 공  종

- 유색 포장 : A= 3,266㎡

- 노면표시 제거 및 재도색 : 12,348㎡

- 표지병 설치 : 334개

- 도로포장정비 : 4개소  A=약 2.22a

□ 조치계획

○ 자전거전용차로 유색포장은 관급자재로 구매 설치하고,

○ 자전거전용차로내 노후 및 파손 부분의 포장정비는『2015년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』에서 정비

○ 노면표시 제거 및 (재)도색, 표지병 설치는『교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』에 포함하여 정비 후, 자전거도로 유지보수비를 사용(약 46,064천원)하여 설계변경 및 정산처리하고자 함

○ 정비 공종

공종	규격	단위	수량	비고
미끄럼방지 시설	t=2~3㎜	㎡	3,266
포장정비	t=5㎝	a	2.22
노면표시 도색	백색, 수동도색	m	1,566
노면표시 도색	백색, 수동재도색	m	3,333
노면표시 도색	황색, 수동, 재도색	m	5,362
노면표시 제거		m	2,087
표지병 설치	양면	개	334

□ 소요예산 집행계획

(단위 : 천원)

예산 현액	미끄럼방지포장(관급자재)	노면표시/표지병	포장정비	비고
151,600	105,600	46,000	-

【예산과목 : 도시교통본부 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비】

□ 향후 계획

○ 2015. 5 : 유색포장은 관급자재 구매 의뢰

○ 2015. 6 : 도로포장정비, 노면표시 제거 및 재도색, 표지병 설치

○ 2015. 7 : 사업시행 결과 보고(보행자전거과)

첨부 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 유색포장 산출내역 1부.

3. 사업비 예산배정 관련 문서 사본 1부.  끝.