문서번호	토목부-10497
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	05/21 노우성
협조
	주무관		강철규

교통신호체계 변경공사 시행

(의주로 지하차도 평면화공사)

2015. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

교통신호체계 변경공사 시행

(의주로 지하차도 평면화공사)

공사중 교통처리계획에 따라 염천교교차로의 교통신호체계 변경(교통신호등 신설 등)이 필요하여 이에 따른 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 공사 착수전 관계자 합동회의 (2015. 2.25.)

- 참석자 : 도기본 설비부, ㈜신성엔지니어링, ㈜트래픽스, 주엔지니어링㈜ 등

○ 서부도로사업소 기전과-3741(2015. 4. 9.) 교통안전시설 원인자부담공사 승인

○ 서울지방경찰청 교통관리과-7960(2015. 3.31.) 공사 중 교통처리계획 승인 통보

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 중구 순화동 120번지 ∼ 봉래동 126-2번지

○ 규    모 : BOX구간 70m, U-Type옹벽 180m, 토공되메우기 198m

○ 공사기간 : 2015. 2. 4.∼ 2015.12.31.

○ 도 급 비 : 1,424백만원

○ 감 리 사 : 삼보기술단  ○ 시 공 사 : ㈜천명토건

Ⅲ		감리단 보고내용

□ 교통신호체계 변경공사 시행

➀ 사  유

- 공사중 교통처리계획에 따라 염천교교차로의 교통신호체계 변경(교통신호등 신설 등)이 필요하여 유지관리부서와 협의한 바 교통안전시설을 원인자부담공사 승인되어 토목공사에 포함하여 시행하기 위함

➁ 수량 증·감 현황

공 종 명	규격	단위	당초	변경	증ㆍ감	비고
1.교통신호제어기			-	-	-
제어기 부분품(L.S.U)	L.S.U	개	-	1	1
아스팔트횡단굴착 1.2M (야간)	기계 80%+인력20% B=1.2m, 2열배관	ⅿ	-	127	127
소형고압블럭 굴착배관	기계 80%+인력20% B=0.6m, 1-2열배관	ⅿ	-	52	52
소형고압블럭 굴착배관(야간)	기계 80%+인력20% B=0.6m, 1-2열배관	ⅿ	-	4	4
전선관(PE54mm 1열)	PE∅54mm 1열	ⅿ	-	35	35
전선관(PE54mm 2열)	PE∅54mm 2열	ⅿ	-	14	14
전선관(PE54mm 2열,야간)	PE∅54mm 2열,야간	ⅿ	-	102	102
전선관(PE100mm 1열)	PE∅100mm 1열	ⅿ	-	3	3
전선관(PE100mm 2열)	PE∅100mm 2열	ⅿ	-	12	12
후강전선관(ST104mm 2열,야간)	∅104mm x 3.6m (ksc 840 2열)	ⅿ	-	131	131
차량등(LED 1면4색)	LED 1면4색	조	-	4	4
차량등(LED 1면3색)	LED 1면3색	조	-	5	5
차량신호등 이설(LED 1면3,4색)	LED 1면3,4색	조	-	2	2
보행신호등, 잔여표시기, 보조신호등(1면2,3색)	LED 1면2,3색	조	-	15	15
보행신호등, 잔여표시기, 보조신호등 이설(1면2,3색)	LED 1면2,3색	조	-	6	6
차량신호등주(단방향) 디자인(∅300×8.5m)	∅318.5 x 6.3t x 8.5m	조	-	1	1
차량신호등주(단방향) 디자인(∅250×8.5m)	∅267.4 x 6.4t x 8.5m	본	-	1	1
차량신호등주(단방향) 디자인(∅200×8.5m)	∅216.3 x 6.0t x 8.5m	본	-	2	2
차량신호등주(단방향) 디자인(∅150×8.5m)	∅165.2 x 4.5t x 8.5m	본	-	1	1
차량신호등주(단방향) 디자인(∅125×4m)	∅139.8 x 4.5t x 4m	본	-	4	4
지주부착대(디자인 13m)	150A*4.5t-4m/125A*4.5t	본	-	1	1
지주부착대(디자인 9m)	125A*6.0t-3m/100A*4.5t	본	-	1	1
지주부착대(디자인 7m)	100A*4.5t-4m/80A*4.5t	본	-	3	3
맨홀(800×800×800mm)	800x800x800 (주철뚜껑, 콘크리트)	개	-	7	7

➂ 공사비 증·감 현황                         (단위 : 천원)

구 분		당초	변경	증ㆍ감	비고
도급액	공급가액	-	262,650	262,650
	부가세	-	26,265	26,265
	계	-	288,915	288,915

※ 단가적용 : 서울특별시 2015년 단가 적용, 낙찰률 86.753% 적용

Ⅳ		검토의견 및 조치계획

○ 감리단 보고내용과 같이 교통신호체계 변경공사를 시행토록 우선 승인하고, 향후 설계변경 심의결과에 따라 정산반영 조치하고자 함.

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.