투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(전체2회, 3차1회)계약 의뢰

1. 우리 본부에서 시행 중인『탄천물재생센타 복개공원화(4단계)공사 전면책임 감리용역』에 대한 설계변경을 아래과 같이 시행코자 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 탄천물재생센타 복개공원화(4단계)공사 전면책임감리용역

나. 위    치 : 강남구 개포로 625 (탄천물재생센타 내)

다. 용역기간 : 2013.1.10~2016.10.22(3차 : 2015.2.14~2016.2.9)

라. 용 역 비 : 전체 1,737,147천원(3차 : 500,000천원)

마. 용 역 사 : ㈜유신 외 1

바. 설계변경 내역

ㅇ 전체분 2회, 3차분 1회                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	전체분	3차분	전체분	3차분
감 리 비	1,737,147	500,000	1,782,640	500,000	- 전체분 증) 45,493 - 3차분 변경 없음
감 리 계약기간	2013.1.22 ~ 2016.10.22	2015.2.14 ~ 2016.2.9	2013.1.22 ~ 2016.10.22	2015.2.14 ~ 2016.1.10	- 전체분 변경 없음 - 3차분 감) 30일

사. 설계변경 사유 : 상주감리원(토목보조감리원) 추가 투입에 따른 용역 기간 및 내역 조정

아. 지체상금 부과 : 미부과

자. 예산과목 : 물재생시설 개선 및 관리, 물재생시설개선(하수도사업), 탄천물재생센타 복개공원화(4단계), 감리비

붙임 : 1. 설계변경 시행방침 1 부.

2. 설계변경(전체분 2회, 3차분1회) 내역서 1 부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조양연		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	05/21 임춘근
협조자	계약2팀장	代전종남
시행	방재시설부-6812	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 14층	/
전화	0237088762	/전송	0237088756	/	choaral@seoul.go.kr	/	대시민공개