문서번호	토목부-10505
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김상도		진재섭	전결 05/21 노우성
협조

품질확보를 위한 시험비용 반영 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

2015. 5.

도시기반시설본부

토 목 부

품질확보를 위한 시험비용 반영 검토보고

(남부순환로~오정대로간 도로개설공사)

공사 품질확보를 위해 시험비용을 반영하고자 검토하여 보고드림

사업개요

○ 사 업 명 : 남부순환로~오정대로간(봉오대로 삼거리간) 도로개설공사

○ 위    치 : 강서구 방화대로 ~ 부천시 오정구 봉오대로 삼거리

○ 규    모 : 도로개설 40m(8차로), 연장 1.23km (부천시 270m)

○ 기    간 : 2010. 9.29. ~ 2015.12.30. (총차)

○ 사 업 비 : 82,700백만원

○ 시 공 사 : 보훈종합건설(주), 감리사  ㈜수성엔지니어링

○ 추진현황

-  '10.09.29. : 공사 착공

-  '12.04.02. : 보완 설계 완료

-  '15.03.04. : 4차 공사 계약

-  '15.03.17. : 부천시 구간 토지보상완료 (28필지)

※ 5월 현재 공정율 57.4% (부천시구간 하수암거설치중)

실정보고 사항

○ 흙깍기 비탈면 보강을 위해 시행한 쏘일네일링에 대하여 품질확보를 위한 인발시험이 시방서에는 명기되어 있으나 도면 및 산출내역서에 미반영되어 있는 실정임. (공사시방서 4-7-4 흙비탈면 보강공, 3.5인발시험)

○ 쏘일네일링의 그라우팅 양생후 인발시험을 실시하여 품질관리 확보 필요.

- 프루프시험 : 기존 0회 → 변경 6회 (시공 272공 ÷ 시험기준 50공당 1회)

평면도 및 현황사진

사업비검토

○ 수량 검토

구 분	규 격	단위	당초	변경	증.△감	비고
6. 부대공
6-9 품질시험비
프루프시험	쏘일네일링	회	-	6	6

○ 사업비 검토 (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증.△감	비 고
6. 부 대 공
직 접 공 사 비	-	2,726,850	2,726,850
간 접 공 사 비	-	454,968	454,968
공 급 가 액	-	3,181,818	3,181,818
부 가 가 치 세	-	318,182	318,182
도 급 액	-	3,500,000	3,500,000
관 급 자 재 비	-	-	-
총 공 사 비	-	3,500,000	3,500,000

○ 단가적용 검토 : 신규 단가 적용(강제협의율 92.75%)

- 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항의 "계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우"에  해당되는 설계변경으로 계약 당사자간에  협의가 이루어지지 않아 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동   단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 신규 비목에   강제협의율 반영

- 강제협의율(92.75%)=[설계율(100%)+낙찰율(85.515%)]× (50/100)

검토의견

○ 쏘일네일링 시공후 품질 확보를 위한 인발시험 실시이 필요하다는 책임 건설사업관리기술자의 실정보고가 타당하므로 승인코자 함.

붙  임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.