함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(최종)에 따른 계약의뢰(2014년 신공덕동외 6개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 신공덕동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회)을 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 신공덕동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : 리플래시건설(주) 대표 조근호

다. 공사기간 : 2014.05.08. ~ 2015.06.30.

라.  계약 금액(도급액)

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증,감	비고
총 공사비		621,609,000	646,675,000	증 25,066,000
도급액	금차	133,984,000	131,105,000	감 2,879,000
	총차	474,609,000	471,730,000	감 2,879,000
관급자재비		147,000,000	174,945,000	증 27,945,000

마. 설계변경사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증,․감

바. 공사개요 : 별첨설계서 참조

사. 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

붙 임 : 1.설계변경 심의결과서.

2.내역서 및 합의서 각 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	김병주		주무관	정준석		급수운영과장	05/21 代김홍준
협조자
시행	급수운영과-10440	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	qudwn8065@seoul.go.kr	/	부분공개(7)