문서번호	교량안전과-9112
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		유제천	05/21 이용심
협조
	특수교량팀장		이수근

「한강교량 일상유지보수공사 책임감리 용역(2차)」 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

교량안전과

「한강교량일상유지보수공사 책임감리용역(2차)」

발주계획 보고

장기계속사업으로 시행중인『한강교량일상유지보수공사 책임감리용역』1차 용역 완료에 따른 2차 용역 발주 계획 보고입니다.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 한강교량일상유지보수공사 책임감리용역

용역기간 : (전체) 2014. 4.10 ~ 2017. 4. 3

( 1차) 2014. 4.10 ~ 2015. 5.31

용 역 비 : (전체) 1,197,980,000원

( 1차)   485,100,000원

용 역 사 : (주)대한컨설탄트(60%), (주)신명건설기술공사(40%)

연도별 사업비 내역

(단위:천원)

구 분	계	2014년 (1차)	2015년 (2차)	2016년 (3차)	비고
계	1,197,980	485,100	308,000	404,880
한강교량일상유지보수공사	1,064,880	400,000	260,000	404,880
동호대교수중우물통보수공사	133,100	85,100	48,000	-
투입 인원	감리원 95.13인․월	감리원 38.86인․월	감리원 23.55인․월	감리원 32.72인․월

Ⅱ		감리대상 사업 현황

2015 한강교량일상유지보수공사

○ 공사개요 : 한강교량(20개소) 일상보수 1식

○ 공사기간 : 2015. 3.30 ~ 2015. 12. 31

○ 공 사 비 : 6,465백만원

동호대교 기초(우물통) 구조물 보수공사(2차)

○ 공사개요 : 수중우물통 보수 39기 (전체 53기)

○ 공사기간 : 2015. 3.5 ~ 2015. 12. 31

○ 공 사 비 : 4,651백만원 (전체 6,563백만원)

Ⅲ		조치계획

상기 감리대상 사업 준공기한에 맞추어 한강교량일상유지보수공사  전면책임감리용역(2차)을 아래와 같이 시행코자합니다.

○ 용역기간 : (2차) 2015. 6.1 ~ 2015. 12.31

○ 용 역 비 : (2차) 308,000,000원

붙임 : 설계내역서 및 감리원 투입계획서 1부. 끝.