문서번호	계약심사과-9204
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목심사팀장	계약심사과장
소영신		정지항	05/21 김성규
협조

「디지털3단지~두산길간 지하차도 건설사업」

설계경제성 심사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.   5.

재   무   국

(계약심사과)

『디지털3단지~두산길간 지하차도 건설사업』

설계경제성 심사결과 보고

도시기반시설본부에서 추진하는「디지털3단지~두산길간 지하차도 건설사업」에 대한 설계경제성 심사 실시결과 보고임

		사업개요

○ 요청부서 : 도시기반설본부(방재시설부)

○ 사 업 명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도건설공사

○ 공 사 비 : 38,382백만원

○ 공사규모 : 경부철도 횡단 지하차도 신설(왕복2차로 452m)

○ 위    치 : 금천구 독산동998-10~가산동319-7

○ 공사기간 : 2015. 8. ~ 2017. 12.

[ 위 치 도 ]	[ 조 감 도 ]
철산교 금천교 안 양 천 광명시 경 부 철 도 독 산 역 디지털3단지 독산동

		심사 일정 및 내용

○ 일  시 : 2015. 3. 26 ~ 4. 13. 기간 중 4일간

○ 장  소 : 도시기반시설본부, 현장, 임대사무실(바비엥∥)

○ 위  원 : 외부위원 4인(리더포함), 내부위원 2명

구분	역할	성 명	소 속	자 격
외부	리더	최영민	서울과학기술대학교겸임교수	CVS 전문가
	위원	구자갑	㈜코아이엔씨 대표	구조기술사
	위원	여규원	삼부토건(주) 기술연구실장	토지 및 기초기술사
	위원	채현식	제이엘건설연구소 부회장	토목시공기술사
내부	위원	김경근, 서연우		토목팀

○ 세부 추진내용

구 분	추 진 사 항	비 고
1일차 (3.26)	∙설계경제성 심사 오리엔테이션 ∙사업설명 및 질의 ∙현장확인(금천구 독산동 현장)	사전조치(설계도서 배부)
2일차 (4.2)	∙사업내용 파악(검토내용 설명 및 질의 ) ∙사업의 기능 및 성능 분석 ∙성능에 대한 중요도 및 가중치 평가	바비엥Ⅱ 발주청 배석
3일차 (4.3)	∙아이디어 발굴 및 대안 제시 ∙대안에 대한 분석 및 성능평가 ∙대안 중 세부 구체화 검토가 필요한 안건 선정	바비엥Ⅱ 발주청 배석
중간처리	∙선정 안건에 대해 공사비와 설계 적용의 가능성 등의 구체적인 타당성 검토 실시	발주청 및 위원
4일차 (4.13)	∙위원별 선정 대안의 세부 검토내용 설명 ∙발주청에 제안할 안건 선정 ☞ 제안 : 38건, 2,629백만원(6.8%) 절감	바비엥Ⅱ 발주청 배석
사후조치	∙발주청 설계반영(채택) 여부 검토 ☞ 채택 : 26건, 1,156백만원(3.0%) 절감 ∙설계경제성 심사 보고서 작성(리더)	제안서 통보(4.16) 결과 통보(5.18)

		심사 결과

○ 제안채택 결과(발주청)

구 분	당 초 공사비	제안 설계반영 여부			절 감 액	절감률
		채 택	부 분 채 택	불채택
위 원 제 안	38,382백만원	38건	-	-	2,629백만원	6.8%
발주청 채 택		24건	2건	12건	1,156백만원	3.0%

○ 품질 및 가치개선 내용

(단위 : 백만원)

구분	절 감 액		공법개선 (시공방법)		안전성 확 보		자재규격 변 경		설 계 제 안
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
위 원 제 안	38	2,629	24	2,711	6	- 171	3	89	5	-
발주청채 택	26	1,156	12	1,238	6	-171	3	89	5	-

※ 설계제안 : 도면의 명칭 수정 및 상세도 추가 등으로 사업비와 관련없는 제안

		행정사항

○ 참석위원에 대한 수당지급

○ 향후 심사사례를 축적하여 건설기술에 대한 지식공유

붙임 1) 제안채택 결과(총괄)

2) 설계경제성심사 최종보고서 1부. 끝.