문서번호	교통정보과-8282
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로정보팀장	교통정보과장
서재호		최종선	05/21 이경순
협 조
	버스정보팀장			정윤식
	운수정보팀장			김병곤
	주무관			조성준

교통 자가통신망(시범사업) 운영경과 보고

2015. 5

도시교통본부

(교통정보과)

교통 자가통신망(시범사업) 운영경과 보고

ITS 시설물에 대한 고품질의 통신서비스 제공와 회선 임대비용 절감을 위해 시범사업으로 추진한 청계1~8가지역 교통 자가통신망에 대하여 그간 운영결과를 보고함

□ 구축사업 개요

○ 사 업 명 : 서울시 교통 자가통신망 구축 시범사업

○ 계 약 액 : 167,500천원

○ 사업기간 : ‘14.9 ~ ’15.2

○ 시 공 사 : 에스넷아이씨티(주)

○ 추진내용 : 청계1~8가지역 26개 시설물(CCTV 23, BIT 2, VMS 1)에 자가통신망 구축

(유선장비 : 케리어이더넷 센터장비 1, 현장장비 3,

무선장비 :  무선메쉬 컨트롤러 1, 현장장비 29)

< 청계1~8가 교통 자가통신망 시범구축 구간 >

UTIS 광케이블 3코어

UTIS 광케이블 24코어

< 통신망 구성도 >

□ 그간 추진경위

○ ’13. 01 : 서울경찰청 UTIS 자가통신망 인수(전파관리소 신고

○ ’13. 02 : 교통 자가통신망 운영 및 활용계획 수립(1부시장 제68호)

○ ’13.7~‘14.3 : 자가통신망 구축 관련 전문가 자문회의(1~5차)

- 망구축, 장비선정 등을 위한 BMT 및 시범사업 시행 방안 등

○ ’14. 09 : 계약 및 사업착수

○ ’14. 10 : 1차 전문가 자문회의 실시(착수단계)

○ ’14. 11 : 정보화사업 보안성검토 완료

○ ’15. 02 : 2차 전문가 자문회의 실시(준공단계)

○ ’15. 03~06 : 시험운영 및 안정화 작업 진행중

∘ 현장장비 설치개소 :  76개소(도로전광표지 21개소, 카메라 55개소)

∘ 통신비용 절감(연간) : 133,945천원

- 회선 비용 : 76개소 × 180,000원 × 12개월 = 164,160천원

- 자가망 유지관리비용 : 377,680천원(구축비용) × 0.08(요율) = 30,214천원

※ 「서남권 돔야구장 도로전광표지 구축」 사업의 VMS 설치 7개소는 자체분석결과 경제성이 없는것으로 판단되어 임대회선으로 추진(B/C : 0.65, NPV : -55백만원)

○ ’14.10~’15.7 : 잠실권 교통정보시스템 구축시 자가통신망으로 추진

□ 구축 및 운영경과

◈ 한국정보통신기술협회(TTA) 성능시험(BMT)시 대비 3배로 속도 향상

⇒ 안정적인 고품질 통신 서비스 제공 기반 검증

성능시험 당시		최대	49.2Mbps	최소	8.7Mbps	평균	21Mbps
현 재		최대	148.5Mbps	최소	29Mbps	평균	74.2Mbps

○ 최신의 통신기술이 적용된 장비로 업그레이드하여 서비스 속도향상

- 150Mbps(IEEE 802.11n) → 433Mbps(IEEE 802.11ac)

○ 지속적인 점검과 실제 운영(3개월)을 통한 통신환경 및 문제점 개선

◈ 무선통신환경 불안정 해소

- 문 제 점 : 무선 혼선으로 통신 불안정(평균 통신속도 40MB)

- 원인분석 : 청계천 주변 다양한 무선 혼선으로 속도저하 및 통신상태 불량

- 문제해결 : 현황을 제조사에 통보하여 펌웨어 개선을 통한 무선 통신 환경의 불안정 해소(평균 속도 74.2MB)

※ 추가 펌웨어 업그레이드 예정 (‘15년 7월경)

- 일부지역 무선통신환경의 불안정으로 전송속도가 떨어지는 문제 개선

◈ 도로전광표지(VMS) 1개소 통신환경 개선

-  시리얼방식 저속통신(56Kbps) → LAN방식 고속통신(29Mbps)

- 구형모뎀으로 저속통신 → 최신 무선메쉬 방식의 고속통신으로 개선

○ 3개월 운영결과 광케이블 접속불량 1건을 제외하면 무장애 운영으로 기존 통신망(임대회선)과 동등한 서비스 제공으로 통신망의 안정성 검증

◈ 장애처리 조치사항 (광케이블 접속불량1건)

- 장애 일시 : 2015. 3. 5.

- 장애 내용 : 청계2가 전체 불법주정차 CCTV 영상 단절

- 장애 조치 : 서울지방경찰청 5층 OJC 접속불량 → OJC 재접속 및 재부팅

※ OJC(Optical Jumper Cord) : 광케이블을 장비에 접속할수 있게 만든 커넥터

※ ‘15. 6월에 임대회선 해지 예정

□ 추진성과

○ 26개 시설물에 대해 고품질의 통신 서비스로 안정적인 CCTV 영상 및 BIT, VMS 정보표출 운영중

○ 임대회선 비용으로 지출되던 연간 66백만원의 예산절감

- (CCTV+VMS)24대 × 230,000원/월+(BIT)2대 × 10,000원/월 × 12월

- 경제성 분석 결과 : B/C 1.83, NPV 227백만원

(분석기간 10년, 할인율 5.5% 적용)

□ 확대방안

○ ITS시설물이 집중된 사업추진 대상지역 5개소 선정

○ 예산상황과 주변상황(통신사 전용회선 임대료 정책, 사업의 특수성 등)을 면밀히 검토하여 추진

- 시 재정상황에 따라 확보가능한 예산을 고려하여 추진

- 최근 통신사에서 회선 임대료를 대폭할인으로 경제성에 대해 재검토 필요

∘ LG U+의 경우 회선임대비용을 절반이하로 할인(47.5%)

-  CCTV용(10Mbps) 1회선 : (기존) 215,666원 → (변경) 102,366원

- 다만, 자가망 구축은 ITS사업 추진시 보이지 않는 장벽이 될수 있는 통신비용에 대한 걱정을 해소하여 다양한 행정서비스를 제공할수 있는 기반이 되는 점을 감안하여 개소별로 판단 필요