문서번호	급수운영과-10353
결재일자	2015.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
정호정		박혁순	05/22 이승철
협조

용산중 외 5개소 아리수 직결 음수대 설치 공사 발주 계획

2015. 05

용산중 외 5개소 아리수 직결 음수대 설치 발주계획

2015년 아리수 직결 음수대 설치계획에 따른 중구, 용산구 관내 대상 학교를 조사하고 아래와 같이 정비하여 아리수 음용율 향상에 기여.

1. 관련공문

급수설비과-2780호(′15.04.24) 아리수 음수대 신설, 추가 교체 등 대상 학교 통보

2. 조사현황

연번	설치기관명	정비 내역	조사결과	비고
1	용산중학교	- 2개소 신설	- 옥내배관 정비 •D=15mm, L=34m	2대
2	성동글로벌 경영고등학교	- 1개소 신설	- 옥내배관 정비 •D=15mm, L=15m	1대
3	덕수초등학교	- 7개소(화장실 앞 등) 이설	- 옥내배관 정비 •D=25mm, L=25m •D=15mm, L=117m
4	원효초등학교	- 3개소(화장실 앞) 이설	- 옥내배관 정비 •D=15mm, L=36m
5	여명학교	- 3개소 신설	- 옥내배관 정비 •D=15mm, L=37m	3대
6	청구초등학교	- 14개소(화장실 앞) 이설	- 옥내배관 정비 •D=15mm, L=311m

3. 추진계획

음 수 대 설치 : 본부(급수설비과)에서 조달구매 후 현장 설치

옥내배관 정비 : 공사 발주 업체 선정 후 교체•정비 시행

추 진  기 간 : 2015. 06. ~ 2015. 09 (4개월간)

4. 조치계획

공사개요 : 옥내배관 D=15~25mm, L=575m(물량산출내역 참조)

소요예산 : 40,000,000원

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,지원사업성시설비

(음수대설치사업)

발주계획 : 공사금액이 소액이므로 전자공개 수의계약으로 발주 후

시공함이 타당할 것으로 사료됨

※관련법 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호

첨부 : 물량산출내역 1부. 끝.