투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약 체결 알림-중랑물재생센터 내 소화조 정밀점검 및 실시설계 용역

물재생과-3284(2015.5.21)호와 관련하여 아래와 같이 계약 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 중랑물재생센터 내 소화조 정밀점검 및 실시설계 용역

나. 계약금액 : 금21,090,000원(금이천일백구만원)

다. 계 약 일 : 2015년  03월  17일

라. 착 수 일 : 2015년  03월  23일

마. 완수기한 : 31일 연장

- 변 경 : 2015년  06월  21일

- 당 초 : 2015년  05월  21일

바. 변경사유 : 상부에 설치된 히타믹스유니트 지지 구조물(10개소)에 대한                              특별 안전점검에 따른 용역기간 추가 소요

사. 계약업체 : ㈜한국구조물안전연구원 (대표 이채규)

(☎ 02-400-8733)

붙임 : 변경계약서 1부.  끝.

	관리과장
주무관	정은경		관리과장	05/22 김홍덕
협조자
시행	관리과-6741	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개