투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	관급자재(이형철근) 변경계약 의뢰

슬러지재활용과“분뇨 유입저류조 증설공사”와 관련하여 아래 관급자재(조달, 3자단가)에 대해 변경계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상물품 : 이형철근

나. 계약업체 : 한국철강(주)

다. 변경내역 : 물량변경 및 납품기한 연장

○ 물량변경

규 격	물품식별 번호	변경전	변경후	비 고
이형봉강(SD300), D13	20160899	0.006톤	0.006톤	-
이형봉강(SD400), HD13	10063866	22.054톤	22.620톤	증) 0.566톤
이형봉강(SD400), HD16	10063867	95.063톤	95.426톤	증) 0.363톤
이형봉강(SD400), HD19	10063868	92.353톤	94.157톤	증) 1.804톤
이형봉강(SD400), HD22	10063869	71.259톤	71.259톤	-
이형봉강(SD400), HD25	10063870	14.387톤	14.387톤	-
합 계		295.122톤	297.855톤	증) 2.733톤

○ 납품기한 연장 :‘15.5.15  → ‘15.8.17

라. 사    유 : 준공기한 연장 및 물량증가.끝.

	슬러지재활용과장
지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	05/22 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-3813	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	대시민공개