투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	증미산 보강공사 준공기한 연기의뢰(강서)

1. 우리 사업소에서 시행중인 아래 공사의 준공기한을 연기코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약 내용

- 공사명: 증미산 도로사면 보강공사

- 계약업체: ㈜동아기업

- 계약금액: 231,296,200원

- 계약일: 2013.12.19

나. 준공기한 연기

- 당초: 2014.3.22

- 변경: 2014.5.12

다. 연기사유: 동절기 품질저하 우려로 중단한 기간 산입

라. 연기사유 귀책소재: 우리 사업소

마. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임: 준공기한 연기의뢰서 및 합의각서 각 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	박상구		도로보수과장	03/04 김효식
협조자
시행	도로보수과-1761	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동 67-1) 강서도로사업소 도로보수과	/
전화	2657-7941	/전송	2658-3886	/	ssunpsg@seoul.go.kr	/	대시민공개