문서번호	주거사업과-5420
결재일자	2015.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주거사업총괄팀장	주거사업과장
전정훈		차창훈	05/22 신중수
협조

전시물품 수집을 위한 철거 및 운반용역 준공기한 연기 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시재생본부

(주거사업과)

- 전시물품 수집을 위한 철거 및 운반용역 -

준공기한 연기 보고

도시재생박물관 전시물품 확보를 위하여 이주 및 철거가 진행중인 정비구역내 물품 수집을 추진하고 있는 『전시물품 수집을 위한 철거 및 운반용역』의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 계약건명 : 전시물품 수집을 위한 철거 및 운반용역

○ 계약업체 : 에픽 (대표 강신명)

○ 계약금액 : 금9,603,000원(금구백육십만삼천원)

○ 계약년월일 : 2014. 11. 07

○ 준공예정일 : 2015. 05. 28

□ 준공기한 연기

○ 연기사유

- 박물관 건립방향, 전시계획, 수집계획 등에 대한 구체적인 방안마련를 위하여 도시재생박물관 개관준비위원회를 구성․운영할 계획으로 효율적인 전시물품 수집을 위해 준공기한을 연기하고자 함.

○ 준공기한 변경

구 분	준 공 기 한	계 약 금 액	비 고
당 초	2014. 11. 07 ~ 2015. 05. 28	9,603,000원
변 경	2014. 11. 07 ~ 2015. 12. 30	변동없음

○ 연기에 따른 귀책소재 및 지체상금 부과

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치사항

○ 준공기한 연기 의뢰 : 서울시 분임경리관

○ 계약상대자에게 통보하여 용역 수행 차질 없도록 조치

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.