문서번호	급수운영과-12520
결재일자	2015.5.26.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		소장
김기봉	代권영안	최명익		05/26 이재덕
협 조

교통소통대책수립 용역 추진계획

(자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사)

2015. 5.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사

교통소통대책수립 용역 추진계획

우리사업소에서 시행예정인 『자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사에 대하여 교통소통대책수립 용역을 추진하여 도로점용으로 인한 시민불편을 최소화 하고자 함.

관련근거 : 서울특별시 광진구 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제3,4조

추진배경

자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사 2구간(자양번영로)은 광진구청에서 관리하는 구도로서 그동안 구도는 교통소통대책 절차를 생략하고 현장에서 교통으로 인한 민원발생시 즉시처리하는 조건으로 공사를 진행하고 있었음.

상기공사의 계약업체인 대민공영(주) 전인영이 광진경찰서에 도로공사 신고서를 제출하였으나, 자양번영로는 상가밀집지역으로 교통으로 인한 민원이 자주 발생하여 교통소통대책을 수립하여 제출토록 요구함.

협의진행사항

일자	방문자	협의내용	광진경찰서 답변
2015.05.11	현장소장(황만열)	도로공사 신고서접수	신고서 반려 및 상가 밀집지역으로 야간공사 및 교통심의결과 제출요구
2015.05.12	관리부장(장호철)	공사구간의 1층은 상가지만 2,3층은 대부분 주택으로 주간공사요청	상가에 주간공사관련 동의서 받고 교통심의결과 제출요구
2015.05.13	현장소장(황만열)	야간공사 시행시 상가주변 주민들의 소음민원발생 으로 주간공사요청	야간공사 시행 및 교통심의결과 제출요구
2015.05.15	현장소장(황만열)	도로공사 신고서 접수	출장
2015.05.18	관리부장(장호철)	야간공사시 소음민원발생으로 주간공사요청	상가밀집지역인 300M는 야간공사 시행 및 교통심의 결과 제출요구
2015.05.19	공사감독(안인광) 현장소장(황만열)	상가주변 소음민원 발생으로 주간공사요청	주간공사 불가 및 교통심의 결과 제출요구
2015.05.21	사업소담당(김기봉)	소음민원 발생으로 주간공사요청	상가밀집지역인 300M는 야간공사 시행 및 교통심의 결과 제출요구

(광진경찰서담당 : 박수철)

상기와 같이 협의진행중에 있으며 야간공사시행은 협의진행중에 있으나, 교통소통대책 수립은 광진구청 교통소통대책에 관한 조례에 명시되어 있어, 교통소통대책을 수립하는 것이 타당하다고 판단됨

용역개요

용역명 : 자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사 교통소통대책 수립용역

공 사 명	위 치	구경(mm)	연장(m)	비고
자양동796번지 외 2개소 배급수관정비공사	자양동227-1~ 자양동590-6	300	940

용역대상 공사현황

용 역 비 : 13,134천원

용역기간 : 착공일로부터 60일간

용역개요 : 상수도관 매설을 위한 이동식 도로점용 940m

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 배급수관)

추진계획

추진절차

- 용역추진계획 방침 → 기술용역 타당성 심사요청(본청 기술심사담당관) → 용역발주 →  입찰공고 및 계약 → 용역수행 및 성과품작성 → 교통소통대책 심의회 보고 → 승인통보 → 공사착공

용역내용

용역목적 : 배급수관 정비공사에 따른 점용되는 도로의 교통소통대책을 수립하여 교통의 질적 향상을 도모하고, 시민불편을 최소화 하고자 함.

과업범위 : 자양번영로 상수도관 부설을 위한 이동식 도로점용

- 자양번영로 (L=940m)

과업내용

- 교통소통대책 계획 요약서

- 사업지 주변 교통시설 설치계획 및 교통관련 계획

- 교통현황 및 분석

- 공사로 인한 교통영향 분석

산출근거

- 실비정액가산방식 : 교통관련계획 표준품셈에 의해 산출된 투입인원에 대하여

적정인원으로 투입비율 조정산출

향후계획

본청 기술심사담당관에 교통소통대책수립용역 타당성 심사요청 후 심사결과에 따라 용역 발주 시행 후 용역착수하고자 하며 야간공사시행은 광진경찰서와 계속 협의 진행하고자 합니다.

첨부 : 1. 기술용역타당성 심사 요청서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 과업지시서 1부.

4. 서울특별시 광진구 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 1부. 끝.