투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사)

1. 시설과-705(2014.3.4)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 ‘보라매 무장애 친화공원 조성사업’ 관련 「보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사

나. 공사기간 : 2013. 12. 23 ~ 2014. 4. 21

다. 도 급 액 : 337,345,940원

라. 도 급 자 : ㈜대명토건 대표 유남숙

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2013. 12. 23. ~ 2014. 4. 21.

- 변 경 : 2013. 12. 23. ~ 2014. 6. 20

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임  1. 준공기한연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

3. 감독처(시설관리공단) 보고서 및 관련 공문 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	양지윤		시설팀장	홍순철		시설과장	03/04 변규열
협조자
시행	시설과-706	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 여의대방로 20길 33(신대방동 395)	/
전화	02-2181-1158	/전송	02-2181-1169	/	ideal2009@seoul.go.kr	/	대시민공개