투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청(구리암사대교 연결도로)

『구리암사대교 연결도로 건설공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청합니다.

1.공사명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

2.물품명 : 레미콘외 4종

3.사  유 : 사용시기 미도래

구 분	납품요구번호	납 품 기 한		비 고
		당 초	변 경
레미콘	12-14-1-54952	‘15.5.31	‘15.12.31
	12-14-1-30609	‘15.6.30	‘15.12.31
	12-14-1-45280	‘15.5.31	‘15.12.31
	12-14-1-55246	‘15.5.31	‘15.12.31
철근	12-14-1-32123	‘15.6.30	‘15.12.31
아스콘	12-14-1-41440	‘15.5.31	‘15.12.31
	12-14-1-55031	‘15.5.31	‘15.12.31
흄관	12-14-1-30696	‘15.6.30	‘15.12.31
	12-14-1-41889	‘15.6.30	‘15.12.31
	12-14-1-41894	‘15.5.31	‘15.12.31
보차도용 콘크리트블럭	12-15-1-24801	‘15.6.30	‘15.9.30

끝.

	토목부장
★주무관	박상철		광역도로과장	진재섭		토목부장	05/26 代서관석
협조자
시행	토목부-10752	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개