문서번호	시설과-705
결재일자	2014.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
양지윤	홍순철	변규열	03/04 이춘희
협 조
	주무관		김승환

『보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사』

준공기한 연기 검토 보고

2014. 3.

동부공원녹지사업소

시   설   과

『보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인 ‘보라매 무장애 친화공원 조성사업’ 관련 「보라매공원 남문화장실 등 2개소 리모델링공사」에 대하여 감독부서로부터 아래와 같이 준공기한 연기 검토 보고서가 제출되어 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 동작구 신대방동 여의대방로20길 33

○ 공사기간 : 2013. 12. 23  ~ 2014. 4. 21

○ 공사금액 : 337,345,940원

○ 도 급 자 : ㈜대명토건 대표 유남숙

○ 공사내용 : 남문화장실 등 2개소 리모델링공사

○ 감독처 : 시설관리공단 공사감독1처

Ⅱ		추진경위

○ 2013. 12.  5 : 공사발주

○ 2013. 12. 19 : 계약체결

○ 2013. 12. 23 : 공사착공

○ 2013. 12. ~ 2. : 동절기 공사중지

○ 2014. 2. 10 ~ 2. 17 : 공사시행을 위한 관리부서 협의 및 공사착수

○ 2014.  2. 26 : 준공기한 연기 요청(시설관리공단 ⇒ 동부공원녹지사업소)

Ⅲ		검토내용

○ 연기사유

- 공원 이용객의 화장실 이용에 지장이 없도록 순차적 공사시행으로 인한 공사기간 연장

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2013. 12. 23 ~ 2014. 4. 21

- 변경 : 2013. 12. 23 ~ 2014. 6. 20

○ 지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조치의견

○ 감독부서(시설관리공단)로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하다고 판단됨으로 계약부서(공원운영과)에 준공기한 연기 요청하고자 함

붙임 : 준공기한 연기요청 보고서 및 관련 공문 1부.

검토자  시설(건축) 7급   양 지 윤  (인)

공업(기계) 7급   김 승 환  (인)