문서번호	시설과-2406
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
윤유환	임록화	진병규	05/26 이춘희
협 조
	주무관		이전호

납품기한 연기 보고

(응봉공원 시설물 정비공사 관급자재(인조잔디))

2015. 5.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

납품기한 연기 보고

(응봉공원 시설물 정비공사 관급자재(인조잔디))

『응봉공원 시설물 정비공사 관급자재(인조잔디) 』납품기한 연기에 대한 보고임

개    요

○ 건    명 : 응봉공원 시설물 정비공사 관급자재(인조잔디)

○ 수    량 : 1,168㎡

○ 납품업체 : 코니그린(주)

○ 계약금액 : 60,829,110원

○ 납품기한 : 2015. 05.29.

납품기한 연기검토

○ 연기사유

- 게이트볼장 인조잔디 시공현장에 현재 배수시설 추가설치 검토중으로

- 선행작업인 게이트볼장 바닥 시공 완료 후, 인조잔디를 설치하여야 하므로 납품기간을 연기하고자 함

○ 납품기한 연기 : 2015. 05.29→06.28(30일 연장)

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

○ 상기 보고와 같이 해당업체와 납품기한 연기 조치코자 합니다.  끝.