문서번호	시설과-3591
결재일자	2015.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장
정연준	김인규	05/27 강신재
협 조	주무관		이용구
	주무관		문정주

중랑천 횡단 상수도관 이설공사

예비 준공검사 시행계획

2015. 5.

상수도사업본부

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

중랑천 횡단 상수도관 이설공사

예비 준공검사 시행계획

「중랑천 횡단 상수도관 이설공사」관련 준공기한이 도래함에 따라 건설기술진흥법 시행령 제56조(발주청의 업무범위)①항5호에 의거 예비 준공검사를 실시코자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

▢ 공 사 명 : 중랑천 횡단 상수도관 이설공사

▢ 공사개요 : 상수도관 신설 – D=1,350㎜, L=125m

(세미쉴드 D=1,650㎜, L=96m)

철거 – D=1,650㎜, L=125m

▢ 도 급 비 : 1,929,140천원

▢ 공사기간 : 2014. 11. 05. ~ 2015. 07. 04.

▢ 시 공 사 : 삼원플랜트컨설턴트㈜ 외 1개사

▢ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

Ⅱ		예비 준공검사 시행

▢ 일  시 : 2015. 06. 05.(금) 10:00 ~

▢ 장  소 : 중랑천 횡단 상수도관 이설공사 현장

▢ 점검자 : 6명(주무관 2명, 외부위원 1명, 기술지원기술자 3명)

시설안전부 시설과 이용구

시설안전부 고도정수반 문정주

외부전문가(상하수도)

건설사업관리 분야별 기술지원기술자

▢ 입회자 : 3명

책임건설사업관리기술자 및 현장대리인

공사관리관

▢ 검사내용

○ 준공기한내 준공 가능여부

○ 책임건설사업관리기술자가 확인한 공사내용 (정산설계도서 등) 중 미진사항

○ 기타 불편사항 등

▢ 검사결과 조치계획

○ 검사결과 지적사항에 대하여 책임건설사업관리기술자에 보완 지시

○ 지적사항 등에 대하여 보완완료 후 책임건설사업관리기술자 확인 후 준공검사원 제출

Ⅲ		관련근거

○ 건설기술진흥법 시행령 제56조(발주청의 업무범위)①항5호

○ 건설사업관리 업무지침서 제100조(준공검사 등의 절차)(국토교통부 고시 제2014-304호(2014.5.23.)

○ 예비준공검사 및 최종하자검사 실시 개선[행정2부시장 방침 제27호(2014.02.06.)]

- 10억이상 공사는 외부전문가와 합동으로 예비준공검사 실시(주공종 분야 전문가 1명이상 포함)

Ⅳ		외부 전문가 수당지급

○ 외부 전문가 : 1명

※ 2015 엔지니어링 특급기술자 단가적용 : 249,900원/일․인 (적용 249,000원)

연번	분야	소속	직책	성명	수당	비고
1	상하수도	㈜KG엔지니어링	전무	조현석	249,000	*************

○ 지급금액 : 249,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,일반운영비(사무관리비)

Ⅴ		향후계획

○ 2015.06월 : 점검결과에 따른 후속조치 완료

○ 2015.07월 : 공사준공

○ 2015.07월 : 시설물 인계(상수도사업본부 ⇒ 동부수도사업소)

붙임 : 예비 준공검사 조서 및 점검의견서(서식) 1부.  끝.